문서번호	치수과-20012
결재일자	2021.11.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

★주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
박철홍		代박철홍		代김경원		전결 11/24 최연우
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		이은술

★ ◉

「옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(2회) 시행 검토 보고

2021. 11.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 보조금 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(2회) 시행 검토 보고

공사 설계변경에 따른 『옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성공사 건설폐기물 처리용역』의 제2회 설계변경을 시행하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명: 옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성공사 건설폐기물 처리용역

○ 기    간: 2021.2.15. ~ 2021.12.31.

○ 내    용: 폐기물 운반 544㎥, 폐기물 처리 1,253t

○ 계 약 자: ㈜강동환경 대표 고강만

○ 계약금액: 금42,212,000원

□ 설계변경 검토 보고

○ 공사 설계변경에 따른 폐기물 처리용역 설계변경 추진

- 본 용역은 『옥수빗물펌프장(유수지) 공영주차장 조성공사』에서 발생하는 건설폐기물을 수집·운반 및 처리하는 용역

- 공사 물량 증·감에 따른 폐기물 물량 변경 반영

□ 변경 내역

○ 용역비 변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	42,212,000	48,082,000	증 5,870,000
도 급 비	42,212,000	48,082,000	증 5,870,000

○ 주요 물량 변경

구 분	공 종	단위	수 량		비 고
			당초	변경
운반	폐기물 운반(콘크리트)	㎥	526	534	증 8
	폐기물 운반(아스콘)	㎥	10	75	증 65
처리	폐기물 처리(콘크리트)	t	1,210	1,230	증 20
	폐기물 처리(아스콘)	t	24	174	증 150

□ 조치 계획

○ 상기 내용과 같이 설계변경을 시행하고 향후 정산처리하고자 함.

붙임  1. 변경내역서(2회) 1부.

2. 공사 설계변경 검토 보고 1부.  끝.