문서번호	공원운영과-14311
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
★주무관		원장	공원운영과장
송준일		신웅식	11/25 류기혁
협 조
	시설과장			임종훈

서서울호수공원

신월IC 가속차로 공사 원상복구계획 검토 보고

2021. 11.

공 원 운 영 과

(서서울호수공원)

서서울호수공원

신월IC 가속차로 공사 원상복구계획 검토 보고

도시기반시설본부에서 추진 중인 서서울호수공원 내 신월IC 가속차로 공사의 제출된 원상복구 상세계획을 검토하고 보고 드림

공사개요

❍ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계)(신월IC 가속차로 공사)

❍ 신 청 인 : 서울시 도시기반시설본부

❍ 점용기간 : 2020. 11. 20. ~ 2021. 12. 31.

❍ 공사내용 : 지장수목

❍ 시 공 사 : 한신공영(주)

❍ 추진현황 및 향후계획

- 2020. 11. 12.  : 공원 임시 점용허가 (2020.11.20. ~ 2021.4.15.)

- 2021. 1. ~ 4. : 철거, 전파기지국․통신주 등 이설, 가속차로 조성

- 2021. 4. 16.    : 점용허가 연장 (1차, 2020.11.20. ~ 2021.7.31.)

- 2021. 7. 26.    : 점용허가 연장 (2차, 2020.11.20. ~ 2021.10.31)

- 2021. 7. ~ 9.  : 방음벽 설치, CCTV․공원등 이설

- 2021. 10.       : 공원 내 도로시설물(가로등) 이설 및 토사반출 요청

- 2021. 11. 1.    : 점용허가 연장 (3차, 2020.11.20. ~ 2021.12.31.)

- 2021. 11. 11. ~ 11. 22. : 원상복구 상세도면 제출 및 세부 협의

(도기본 ⇒ 서서울호수공원, 이메일)

- 2021. 11.~12. : 토사반출 완료 및 공원 내 도로시설물(가로등) 이설 예정

원상복구 세부계획 검토내용

❍ 황토포장구간 측구 수로관 추가 설치

- 기존 포장면 구배가 일정치 않아 물고임 우려 및 우천시 공원내로 표면배수가 집중되지 않도록 황토포장 측구 수로관(플륨관) 반영

❍ 황토포장 시 관리․공사 차량 통행이 가능한 규격 반영

- 유지관리 차량 및 공원관리를 위한 공사차량 통행을 위한 적정 규격 반영

(강도 fck=210mpa, 와이어메쉬 포함, 경계엣지 설치)

❍ 수목 하자율 저감 및 유지관리를 위한 관수시설(QC밸브) 설치

❍ 관목 및 지피류 적정 밀도 및 수량 반영

- 공사 전 기존 수목 규격과 비례하여 관목 및 지피류의 적정 밀도 반영을 위한 수량 추가반영 요청

❍ 방음벽 앞 하자발생 및 유지관리를 위한 관목 수종 변경

- 병해 발생율이 높은 사철나무를 송악, 산철쭉, 자산홍, 조팝나무 등으로 교체

❍ 공용기지국 주변 차폐식재, 산책로 연결식재 추가 반영

- 공용기지국이 노출되어 있어 미관상 차폐 식재를 반영하고 산책로 연결부 식재 단절로 기존 산책로와 부조화되므로 연결식재(대왕참나무 8주) 추가 요청

복구대상지 전경	공용기지국 현황

보고자 의견

❍ 상기와 같이 검토하였으며 원상복구계획 보완 요청사항을 도시기반시설본부에 송부코자 합니다.

붙임 1.  원상복구계획 보완요청 사항 1부.

2.  원상복구도면(기존, 변경) 각 1부.  끝.