“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰[2021년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역]

1. 「2021년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역」건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 2021년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

나. 계 약 자 : ****************

다. 계약기간 : `21. 5. 17. ～ `21. 12. 31.

라. 설계변경 사유

- 계약물량 증가 : 유량계 점검, 유량계 교정검사 물량증가

- 계약물량 감소 : 다회선센서교체, 건식센서교체 물량감소

마. 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
계약금액	**********	**********	*******

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

수선유지비(유량계 교정검사 및 유지보수)

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 합의서 1부.

3. 설계변경 시행 및 심의의견서 각 1부.

4. 설계변경 계획 보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이재덕		기전팀장	나동안		시설관리과장	11/25 代김진성
협조자
시행	시설관리과-19281	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (강남수도사업소 시설관리과)	/
전화	02-3146-4916	/전송	02-3146-4939	/	jdseoul29@seoul.go.kr	/	부분공개(5)