투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(최종) 시행 (2021년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역-강서2구역)

1. 우리사업소에서 시행중인『2021년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역 - 강서 2구역』에 대한 설계변경(최종)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2021년 노후포장도로정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역 - 강서2구역

나. 공사기간 : ’21.3.31. ~ ’21.12.31.

다. 공사개요 : 폐아스콘 운반 16,165톤, 폐아스콘 처리 16,165톤

라. 도 급 자 : ㈜금왕산업개발 대표 강수영

마. 변경사유 : 노후포장 공사 완료에 따른 실물량 반영

바. 변경내역                                                       (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비고
도급비	공급가액	***********	***********	**************
	부가세	**********	**********	**************
	계	***********	***********	**************

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로

정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경서 검토서(책임감리) 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박세준		도로보수과장	代박세준		강서도로사업소장	11/25 김용제
협조자
시행	도로보수과-6615	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/	sejun486@seoul.go.kr	/	부분공개(5)