급수공사 연기 보고서(개량-50)

시 행	급수운영과-19243
시행일자
수 신 자	내부결재
접 수
접수일자
공개구분	대시민공개

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
김병국		임인택	11/26 김종원
협 조

명에 의거 마천동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사 현황

○ 공사명: 2021년 마천동 외 14개동 상수도공사

○ 계약상대자: 용은씨엔씨(주)  대표 윤석

□ 연기 내역

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비고
1	가락동 166-30	개량-50	2021.10.28.~ 2021.11.19.	2021.11.19.~ 2021.12.17.

○ 연기사유

- 간선도로 도로굴척 허가 지연으로 해당 허가 기간내 공사가 가능하지 못하였으며, 가락동 166-29 인입관폐쇄의뢰(요금과-18017(2021. 11. 3.)) 이 추가로 접수돼 도로굴착허가점용기간 연장과 가락동 166-29 간선도로 굴착허가를 득한 후 같은 날 공사를 하고자 합니다.

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 변경 공사기간으로 연기.  끝.