문서번호	건축부-10723
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		건축총괄과장	건축부장
전재진		강성욱	전결 09/02 代강성욱
협 조

「신림2 빗물펌프장 설치건축공사」

감리자 실정보고 검토 결과 보고

- 설계도서 조정 관련 -

2014. 09.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「신림2 빗물펌프장 설치공사」

감리자 실정보고 검토 결과 보고

- 설계도서 조정 관련-

『신림2 빗물펌프장 설치공사』 감리자로부터 제출된 철골공사에 대한 공사수량변경 요청사항 등 현장 적용에 따른 설계도서 조정 요청에 대한 실정보고를 검토 보고

□ 공사개요

○ 위    치 : 관악구 신사동 496번지 일원

○ 건립규모 : 지상2층, 연면적 820.04㎡

○ 공사기간 : '13. 01. 04 ～'14. 12. 15

○ 건축공사도급액 : 1,556백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링

○ 현 공 정 : 외장판넬 설치공사중(공정율 75%)

□ 추진경위

○ 2014.07.01. : 건축공사 착수

○ 2014.08.18. : 책임감리원 실정보고

□ 실정보고 내용

○ 신림2 빗물펌프장 설치공사 중 건축분야 철골공사와 관련 설계서 누락부분에 대한 설계변경

- 내역서 누락사항의 반영 요청

․ 크레인거더 시공도면 오류에 따른 부재 누락분 및 시공변경

․ 사택부분 단열을 위한 창호공사(복층유리)로 시공

․ 주계단실 물량누락분(철근,레미콘,거푸집) 등

□ 공사비 증감

○ 변경금액 : 증)39,750천원

- 당초 : 291,449천원

- 변경 : 331,199천원

□ 감리단 검토 의견

○ 설계물량 내역누락분 등 반영요청에 대하여 검토한 결과, 설계변경 사항이 타당하다 판단되어 실정 보고

□ 처리의견

○ 책임감리원의 의견이 적정하다 판단되므로 우선 선시공하고 추후, 실정보고 사항에 대하여는 설계변경 처리코자함.

붙 임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.