정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-25	담당부서 작성자	소방재난본부 소방행정과 (이효원/3706-1391)
정 책 명	소방행정타운 건립
사업개요	○ 추진배경 - 소방환경 변화에 부합한 능동적 현장대응 역량 확보 (세계 최고 훈련시설 건립 및 지휘기관 통합 재난관리시스템 구축) - 글로벌 안전도시 서울의 위상에 부합한 시민교육 인프라 구축 (119챌린지시설 등 신설로 안전체험시설 부족 해소) ○ 추진기간 : 2014. ~ 2022.12.(1~3단계 사업) ○ 총사업비 : 280,259백만원 ○ 주요내용 - 건립부지 : 은평구 진관동 물푸레골 (부지면적 : 48,950.1㎡) - 규 모 : 11개 건축물(40,025㎡), 11개 시설물(12,507㎡) ※ 1단계 착·완공(’15.12~’18.6), 2단계(’18~’19년)·3단계(’19~’22년)
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 12.9.12 : ‘서울 소방행정타운 건설 기본 계획’ 수립 - 소방행정과장 이상구, 소방재난본부장 조성완, 행정2부시장 문승국, 서울특별시장 박원순 ○ 12.9.22∼12.22 : ‘서울 소방행정타운 건설 관련 타당성 조사 실시 계획’ 수립 - 담당자 황태연, 조직경영팀장 윤득수, 소방행정과장 이상구, 소방재난본부장 조성완 ○ 13.3.14∼8.21 : 소방행정타운 건설 투자심사 추진 - 담당자 황태연, 조직경영팀장 윤득수, 소방행정과장 진준호, 소방재난본부장 조성완 ○ 13.7.11 : 공유재산 심의 - 주무관 엄태현, 재산정책팀장 최대봉, 자산관리과장 이혜경 ○ 13.7.11 : 공유재산관리계획 자료제출 - 담당자 오재경, 조직경영팀장 김윤섭, 소방행정과장 진준호 ○ 14.1.8 : 1단계 건립사업 설계용역 의뢰 - 담당자 최장근, 단장 김두일, 소방행정과장 진준호 ○ 14.3.31 : ‘소방행정타운 건립 변경계획’수립 - 단장 김두일, 소방정책팀장 윤득수, 소방재난본부장 권순경, 행정2부시장 김병하 ○ 14.5.19 : 부지 매매계약 체결(SH공사) - 담당자 유재열, 단장 김두일, 소방행정과장 진준호 소방재난본부장 권순경 ○ 14.5.28 : 현상설계공모 공고 - 주무관 박근우, 건축관리과장 박하규, 건축부장 이병석, 시설국장 이광세, 도시기반시설본부장 천석현 ○ 14.9.19 : 현상설계공모 당선작 선정 - 주무관 김동선, 건축심사팀장 차재옥, 기술심사담당관 최진선 ○ 14.11.7 : 현상설계공모 당선에 따른 설계계약 체결 - 주무관 김정희A, 강홍기 건설총괄부장, 형태경 시설국장 ○ 15.02.12 : 소방행정타운 2단계 투자심사 의뢰 - 담당자 김상탁, 단장 김두일, 소방행정과장 이성묵 ○ 15.02.17 : 소방행정타운 내부콘텐츠 수립 - 담당자 윤석민, 단장 김두일, 소방행정과장 이성묵 ○ 15.07.13 : 소방행정타운 설계용역 중간보고회 개최 - 담당자 곽민규, 단장 김두일, 소방행정과장 이성묵 ○ 15.07.20 : 소방행정타운 건축허가 협의 요청 - 담당자 곽민규, 단장 김두일, 소방행정과장 이성묵 ○ 15.08.02 : 용지매매 변경계약 - 담당자 김상탁, 단장 김두일, 소방행정과장 이성묵, 소방재난본부장 권순경 ○ 15.10.02 :도시계획시설사업 실시계획인가 고시 열람공고 계획 수립 - 담당자 곽민규, 단장 김두일, 소방행정과장 이성묵 ○ 15.12.08 : 소방행정타운 설계용역 준공검사 - 담당자 남궁환, 문화시설과장 안연수, 건축부장 안재혁 ○ 16.05.04 : 소방행정타운 건립공사 계약 체결 - 담담자 정호욱, 계약1팀장 김점선 ○ 16.08.09 : 소방행정타운 2단계 사업 타당성조사 용역 의뢰 - 담당자 김영민, 단장 박정경, 소방행정과장 代김명호 ○ 16.12.26 : 소방행정타운 2단계 사업 건립 변경 검토보고 - 담당자 김영민, 단장 박정경, 소방행정과장 김선영, 소방재난본부장 권순경 ○ 17.05.04 : 소방행정타운 2단계 사업 타당성조사 용역 완료 보고 - 담당자 김영민, 단장 박정경, 소방행정과장 김선영, 소방재난본부장 권순경 ○ 17.05.26 : 소방행정타운 2단계 사업 투자심사 의뢰 - 담당자 방지호, 조직경영팀장 이웅기, 소방행정과장 代김명호