문서번호	설비부-17109
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이정훈	배수웅	11/29 김호성

『세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사』

관급자재 납품기한 변경(연기) 검토 보고

2021. 11.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사』

관급자재(자동제어) 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인『세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사』와 관련하여, 소요되는 관급자재(자동제어)의 납품기한을 아래와 같이 변경(연기)하고자 함.

공사현황

❍ 사 업 명: 세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사

❍ 위    치: 서울시 중구 세운상가군(삼풍~PJ~인현~진양상가)

❍ 사업기간: 2019.3.22.~2021.12.17.

❍ 감 리 단: **************

관련근거

❍ 관급자재 납품기한 연기요청*****************

❍ 물품 다수공급자 계약특수조건 제26조(납품기한의 변경)

검토내용

❍ 납품기한 연기 사유

- 선행 공종(건축) 일정에 따른 설비분야 관급자재 납품시기 미도래

❍ 납품기한 연기내용

게 약 번 호 (구매관리번호)	품 명	계 약 금 액 (원)	납 품 기 한
			변경전	변경후
********** ************	*****	**********	**********	**********

감리단 검토의견

❍ 검토의견

- 선행공정인 건축공사 지연 등으로 후속 공정인 전기공사 관급자재(빌딩자동제어) 납품기한을 변경하는 것이 타당하다 사료됨

보고자 검토의견

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 관급자재 납품기한 연기에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 납품기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

붙임: 감리단 요청 공문 1부.  끝.