문서번호	건축부-19238
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김송희		조승제	11/29 신명승
협조

「강북노동자복지관 증축 및 모델링공사」

관급자재(금속제창)수량 변경 검토 보고

2021. 11.

「강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사」

관급자재(금속제창) 수량 변경  검토 보고

본 사업의 관급자재(금속제창)수량 변경 실정보고건이 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

******************************************************

**********************************************************

1		사업개요

○ 공 사 명: 강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사

○ 위치/규모: 마포구 환일길13/지하1층~지상5층, 증축, 연면적 2,773㎡

****************************************

○ 공사기간: 2020.12.~2022.3.(16개월)

○ 설계/감리/시공: ㈜오르트건축사사무소/㈜건축사사무소광장/슈프림건설㈜

***********************************

***********************

2		실정보고 내용

○ 보고현황(관급자재 납품업체→건설사업관리단→건축부)

-「실정보고(금속제창)에 대한 적정성 검토보고」[강북복지 제21-180,'21.11.25.]

○ 관련근거

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)제①항

○  실정보고 변경사항 및 사유

변경사항	주요 변경사유
*************************************	**********************************************************************************************************
*********************************************	****************************************************************
********************************************************	***********************************************************************************************************************************

○ 관급자재(금속제창)수량 변경내역 검토

구 분	창호명	개소	품 명	단위	수 량			비고
					당초	변경	증감
** **	****	*	**********	**	****	*	*****	**
	****	*	**********	**	****	*	*****	**
	****	*	**********	**	*	****	****	*********
			*******	**	*	***	***
			****	**	*	***	***
	*****	*	**********	**	*	****	****	**********
			*******	**	*	****	****
			****	**	*	***	***
	**** *** ****	**	**********	**	*	****	****
	***** *** ****	**	**********	**	*	**	**
	***** *****	*	**********	**	*	*****	*****
	***** *****	*	**********	**	*	***	***

○ 관급자재비 변경내역

품 명	단가 (원)	당 초		변 경		증 감
		단위 (kg)	금액(원)	단위 (kg)	금액(원)	단위 (kg)	금액 (원)
**********	******	*******	**********	*******	**********	*****	*********
*******	******	*****	**********	*****	**********	****	*******
***	*****	****	*******	****	*******	*
****	******	*****	*********	*****	*********	***	*******
**		*******	**********	*******	**********	*****	*********

3		건설사업단 의견

*******************************************************************************

4		처리의견

****************************************************

붙임	관급자재(금속제창 구매)변경에 대한 적정성 검토보고 1부.  끝.