문서번호	설비부-17105
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
지상범		장재순	11/29 김호성
협조

『평창동 미술문화복합공간 건립 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『평창동 미술문화복합공간 건립 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 검토보고

우리 부에서 추진하고 있는『평창동 미술문화복합공간 건립 전기공사』관련, 계약상대자로부터 물가변동으로 의한 계약금액 조정(1회) 요청이 있어 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 지방계약법 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고[PPA  제2021-632호('21.11.25.)]

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 평창동 미술문화복합공간 건립 전기공사

○ 위    치 : 종로구 평창문화로 101 외 8필지

○ 규    모 : 대지 7,347㎡, 연면적 5,590㎡(지하1층~지상5층)

○ 계약기간 : ************************

○ 계약금액 : ***********

○ 시 공 사 : *******

○ 건설사업관리단 : *******

○ 계약현황

계약건명	차수	계약기간	계약금액(원)	비고
***	*	**********************	**********
	*	**********************	**********
	*	**********************	***********

Ⅲ		검토내용

○ 물가변동(ESC)으로 인한 계약금액 조정 충족 요건

- 계약을 체결한 날(직전 조정기준일)부터 90일 이상 경과

- 입찰일(직전 조정기준일)을 기준으로 하여 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

○ 물가변동(ESC) 조정 조건 충족 여부

구 분	제1회	충족여부	비 고
***	***	*	*****
****	**********	*	*****
***	***
*****	****	*	****

○ 계약금액 조정(제1회) 세부검토 내용

구 분		금 액	비 고
물가변동 대상금액의 계약금액(A)		***********
물가변동 적용제외 금액(B)		***********
물가변동 조정기준일 현재공정률	예정공정률	****
	실시공정률	****
	적용공정률	****
물가변동 적용대가(C)		***********
물가변동 조정률(D)		****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		**********	E = C × D
선급금 공제금액(F)		*	선금 지급 없음
물가변동 조정 적용금액		**********

○ 계약금액 조정 금액                                        (단위 : 원)

차 수	계약금액	조정금액	증·감액	비 고
총 차	**********	**********	************
1 차	**********	**********	************
2 차	**********	**********	************

○ 건설사업관리인 검토의견

- 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 검토한 결과, 물가 변동 조정 경과기간이 기준시점 일로부터 90일 이상(299일) 경과하고,

- 지수조정률이 100분의 3이상(3.73%) 증가 되어 관련 규정에 의거 상기와 같이 물가변동 조정금액으로 정함이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		보고자의견

○『평창동 미술문화복합공간 전기공사』관련 건설사업관리기술단의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 계약금액 조정 사항을 계약부서(총무부)에 변경 계약 의뢰하고자 함.

붙임  물가변동 관련 계약금액 조정(제1회) 검토 보고 1부.  끝.