문서번호	건축부-10838
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이민영		신명승	09/04 김우성
협조

서울과학관 건립공사 실정보고(사토장 선정) 검토

2014. 9.

서울과학관 건립공사

실정보고(사토장 선정) 검토

서울과학관 건립공사와 관련, 사토장 선정을 위한 책임감리원의 실정보고 검토.

1		관련근거

○ 정과감 제14-137(2014.09.02.)호

- 사토장 선정 실정보고

2		사토장 선정 경위

○ 설계도서 지정 사토장

⇒ 반입시기 조정/협의 및 소량으로 반입이 어려움

○ 흙은행시스템

⇒ 반입시기 조정/협의 및 소량으로 반입이 어려움

○ 토석정보공유 시스템

⇒ 반입시기 조정/협의 및 소량으로 반입이 어려움

○ 시공사 사토장 선정

⇒ 사토반출 일정 조정이 용이하며, 현장 발생 토공물량 수용가능

3		실정보고 내용

○ 책임감리원 검토내용(의견)

- 시공사가 제출한 사토장 선정 관련 동의서 및 제반서류, 실사 확인 결과 적정하며,

- 설계운반거리와 동일한 15km로 도급단가를 적용하여 반출/처리하는 것이 타당하다고 사료됨.

※ 흙은행시스템 및 토석정보시스템을 통한 추가 사토장 협의/결정시 별도 실정보고 하고록 함.

4		처리방안

○ 책임감리원의 의견이 사토장 선정에 이상 없음으로 검토 보고된 바, 실정보고를 승인하고자 함.

붙임 : 책임감리원 실정보고(정과감 제14-137호) 1부. 끝.