문서번호	기전과-6605
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		11/29 서승완
협조

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

강서도로사업소

[기 전 과]

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

실정보고사항 검토보고

2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 책임감리가 제출한 실정보고에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(방송회관 외 1개소) 실정보고

- 문서번호 대영GE21A-11-38(21. 11. 26.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 양천구 이마트 교차로 앞, 방송회관 교차로 앞

○ 공사내용

- 이마트 교차로 앞 : 신호기(차) 추가 설치

- 방송회관 교차로 앞 : 신호기(차) 추가 설치

○ 계약금액 : 39,580,000원

○ 공사기간 : 2021. 07. 09. ∼ 2021. 12. 05.

○ 계약업체 : ㈜서우이에프씨 대표 김명희

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 실정보고 내용

○ 도급비 세부내역 : 감 5,348천원

- 이마트 교차로 : 직접비 감 1,782천원

· 현장조사결과 기존 배관의 선통이 가능하여 물량 삭제

· 잔여표시기 기설치로 인한 신설 물량 삭제

· 현장조사결과 가공주 철거 불가로 인한 물량 삭제

· 기존 가로등 암대와 신호등주의 연결부가 상이하여 가로등 암대 규격 변경

- 방송회관 교차로 : 직접비 증 417천원

· 제어기 기초 재사용으로 인한 물량 삭제 및 제어기 부분품 물량 변동

· 설계오류로 인한 신호케이블 물량 변동

· 기존 가로등 암대와 신호등주의 연결부가 상이하여 가로등 암대 규격 변경

- 현장여건에 따른 작업물량 정산 : 감 749천원

- 간접비(간접노무비 및 제경비) : 감 2,748천원

- 부가가치세 : 감 486천원

□ 조치의견

○ 책임감리 실정보고 내용이 타당하여 감리업체에 우선 실정보고 내용에       따라 작업 시행토록 지시하고 추후 작업완료 보고 시에 정산

붙임  2021년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사(방송회관 외 1개소)

실정보고 1부.  끝.