문서번호	설비부-17542
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	배수웅	12/03 김호성

「세운상가군 공공공간 조성(2단계) 기계설비공사(2차)」

설계변경 및 준공기한 연장 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「세운상가군 공공공간 조성(2단계) 기계설비공사(2차)」

설계변경 및 준공기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진 중인「세운상가군 공공공간 조성(2단계) 기계 설비공사(2차)」설계변경 및 준공기한 연장사항에 대하여 검토하여 보고드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 세운상가군 공공공간 조성(2단계) 기계설비공사(1차)

○ 위    치 : 중구 세운상가군(삼풍~PJ~인현~진양상가)

○ 규    모 : 보행데크 신설·정비, 공중보행교(2개소) 등

○ 기    간 : 2019.03.27.~2021.12.17.

○ 공 사 비 : ************

○ 도 급 사 : ㈜태건기계, ㈜동우이에프씨

○ 감 리 사 : ㈜토문엔지니어링 건축사사무소, ㈜희림 종합건축사사무소

○ 계약현황

구 분	계약금액(원)	계약기간	비 고
**	***********	*************************
**	***********	*************************

2		관련근거

○ 건설사업관리단 설계변경 및 준공기한 연장 검토보고

(토문 제2021-1514호, 2021.12.01.)

3		검토내용

□ 설계변경 사항

○ 설계변경 내용 : 실정보고 승인건(설비부-15740호)

− 사업의뢰부서 요청사항 반영(역사도심재생과-13224호, `19.12.09.)

구 분	설계변경 내용	검토결과
****	******************* ********************************* ******************************* ************************** ***************************************** *********************************** ********************************* *********************************	**************
**	***************************** *************************	**************
*****		**************

○ 공사비 세부 변경내역

(단위 : 원)

항 목	변경 전	변경 후	증·감	비고
***	********	********	**************
***	*********	*********	**************
**	********	********	**************
*****	********	********	**************
**	********	********	**************
*****	********	********	**************
********	********	********	*
********	*******	*******	*
**	***********	***********	**************

○ 도급비 변경사항

구분	계약금액(원)			비 고
	변경 전	변경 후	증감액
**	***********	***********	**************
**	***********	***********	**************

□ 준공기한 연장 사항

○ 준공기한 연장 사유

− 선행공종(건축공사) 준공기한 연장(`21.12.13. →`21.12.31.)에 따라 후속 공종인 기계설비공사 준공기한 연장

○ 준공기한 연장 내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
**	***********************	***********************	*******
**	***********************	***********************	*******

○ 건설사업관리단 검토의견

− 실정보고 승인 내용과 같이 ************** 변경이 타당하며

− 선행공종 준공기한 연장에 따른 후속 기계설비공사의 준공기한 연장이 불가피하다고 판단됨

4		보고자 의견

○ 건설사업관리단의 설계변경 사항에 대하여 검토한 결과, 적정하다고 판단되어 총무부에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 설계변경 및 준공기한 연장 검토보고 1부.  끝.