문서번호	치수과-20767
결재일자	2021.12.6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김한성		김경원		민병기		12/06 최연우
협조

★ ◉

「고산자로 202 주변 외 2개소 사각형거 보수공사(1구간)」 설계변경(최종) 검토 보고

2021. 12.

(안전건설교통국 치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 공기업하수도특별회계 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

「고산자로 202 주변 외 2개소 사각형거 보수공사(1구간)」

설계변경(최종) 검토 보고

우리 구에서 시행중인『고산자로 202 주변 외 2개소 사각형거 보수공사(1구간)』과 관련하여, 제경비 정산 등 변경 사항에 대하여 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 고산자로 202 주변 외 2개소 사각형거 보수공사(1구간)

○ 위    치: 고산자로 202 주변

○ 기    간: 2021. 6. 17. ~ 2021. 12. 20.

○ 규    모: 하수사각형거 ▣1.2m×1.2m L=264m,  단면보수 1,020.20㎡

○ 사 업 비: 509,765천원(시비: 도급비 492,975천원, 이전비 16,790천원)

○ 시 공 사: ****************

○ 건설사업관리용역사: ***************

□ 설계변경 내용

○ 설계변경 사유

- 건강·연금보험료 및 산업안전보건관리비 등 제경비 정산

- 교통신호수 정산 등 현장 여건에 따른 공종별 물량 감소

○ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	509,765,000	459,086,000	감 50,679,000
도 급 비	492,975,000	451,891,000	감 41,084,000
이 전 비	16,790,000	7,195,000	감 9,595,000

○ 예산과목

- 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비 [시비-공기업하수도사업특별회계(고산자로 202 주변 외 2개소 사각형거 보수)]

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경 된 사항에 대하여 첨부 된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.