문서번호	방재시설부-15479
결재일자	2021. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
홍민철		김태중	12/06 박홍봉
협조
	주무관		김소연

『국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)』

건설사업관리용역 5차 발주 검토 보고

2021.  12.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

『국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계)』

건설사업관리용역 5차 발주 검토 보고

『국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역』관련 5차 발주 검토 보고임.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용역기간 : ’16.  10.  4. ~ ’22.  2.  3. (총차)

’16.  10.  4. ~ ’18. 12. 31. (1차)

’19.   1.  1. ~ ’19. 12. 31. (2차)

’20.   1.  1. ~ ’20. 12. 31. (3차)

’21.   1.  1. ~ ’21. 07. 27. (4차)

’22.   1.  1. ~ ’22. 12. 31. (5차)

○ 용 역 비 : 6,990,370천원 (금차 : 927,400천원)

○ 건설사업관리단 : ㈜이산, ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링, ㈜한맥기술

Ⅱ		추 진 경 위

○ 용역 계약 : ’16.08.17.

○ 용역 착수 : ’16.10.04.

○ 착수일 조정(1차) : ’16.10.04. ⇒ ’16.11.01.

○ 착수일 조정(2차) : ’16.11.01. ⇒ ’16.12.01.

○ 착수일 조정(3차) : ’16.12.01. ⇒ 착수일 별도 통보

○ 책임건설사업관리기술자 1인 투입 : ’17.04.03.

○ 용역 일시정지(1차) : ’18.1.1.~’18.2.28

○ 1차분 준공기한 연장 : ’18.02.06. ⇒ ’18.12.31.

○ 용역 일시정지(2차) : ’18.05.01.~ 착수일 별도 통보

○ 착수 및 업무수행 : ’18.08.01 ~ 현재

Ⅲ		보 고 내 용

○ ’22년 예산 : 927.4백만원

- 예산과목 : 안전총괄본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별회계), 국회대로 지하차도 및 상부공원화, 시설비 및 부대비, 감리비

○ 발주계획(5차)

- 용역기간 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31.

- 용역금액 : 927,400천원

○ 차수별 용역금액

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	1차	2차	3 차	4 차	5 차	잔 여
용역비	6,990,370	338,184	836,440	888,800	935,000	927.400	3,064,546

○ 5차 건설사업관리기술인 투입 계획

분야 및 등급(인원)		투입계획기간	비고
책임	특급기술인	2022.01.01. ~ 2022.12.31
분야별	고급기술인(토목)	2022.01.01. ~ 2022.12.31
	고급기술인(안전)	2022.01.01. ~ 2022.12.31
	중급기술인(토목)	2022.01.01. ~ 2022.12.31
	중급기술인(용접)	2022.01.01. ~ 2022.02.14
기술지원	분야별	2022.01.01. ~ 2022.12.31

Ⅳ		조 치 의 견

○ 건설사업관리용역 5차분 발주내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 계약부서에 계약을 의뢰하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 발주요청서 1부.  끝.