서울특별시 고시 제2021-  호

도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경) 고시

1. 서울특별시 성동구고시 제88호(2019. 9. 19.)로 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면 고시되고 서울특별시고시 제2020-92호(2020. 3. 5.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시된 「동호로~장터길 연결체계 개선사업(금호동4가 1436 ~ 1440-1)」에 대하여,

2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법률 시행령 제97조의 규정에 따라 실시계획(변경)하고, 같은 법률 제91조 및 같은 법률 시행령 제100조의 규정 따라 다음과 같이 고시합니다.

2021년  12월  일

서울특별시장

가. 사업시행지의 위치(변경없음): 서울특별시 성동구 금호동4가 1436 ~ 1440-1

나. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

- 종류: 도시계획시설(도로) 사업

- 명칭: 동호로~장터길 연결체계 개선사업(금호동4가 1436 ~ 1440-1)

다. 사업의규모(변경없음): 도로확장 폭8m→18m, 연장 40m

라. 사업시행자(변경없음): 서울특별시장

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

- 당초: 실시계획인가일로부터 2021. 12. 31.까지

- 변경: 실시계획인가일로부터 2022.  6. 30.까지

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자·권리자의 성명·주소:생략(변경없음)

사. 기타 자세한 사항은 서울시청 도로계획과(☎2133-8083) 및 성동구청 토목과(☎2286-5764)로 문의하시기 바랍니다.