문서번호	방재시설부-15597
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장		시설국장
홍민철	김태중	박홍봉		12/08 代구본상
협 조
	주무관		김소연

『국회대로지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설공사』

차수공사(3차) 발주계획 검토 보고

2021. 12.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『국회대로지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설공사』

차수공사(3차) 발주계획 검토 보고

장기계속 공사로 시행중인『국회대로지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설공사』차수공사(3차) 발주 계획에 대한 검토 보고임.

[관련공문 : 이산2021-국회대로(건)-513호(2021.12.07.)]

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

○ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 경인2지하차도 Box 시점

○ 규    모 : 총연장 L=1.22Km, 왕복4차로

지하차도 신설 995m(U-Type 260m, Box-Type 735m)

○ 공사기간 : 총차 ’18. 8.8.~’24.12.31.

(3차 ’22. 01.01.~’22.12.31.)

○ 도 급 비 : 전체 956억원(도급비 838억원, 관급자재 118억원)

3차 82억원(도급비 75억원, 관급자재 7억원)

○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 1개사

○ 건설사업관리단 : ㈜이산 외 4개사

Ⅱ		추 진 경 위

○ '18.08.02. : 도급계약체결(시공사: 한신공영외1, 도급액:659억)

○ '18.08.08. : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 착공

○ '19.01.25. : 중첩구간 공사 실 착수

○ '19.11.25. : 2차공사 착공

Ⅲ		발주계획(3차)

○ 차수별 공사현황

구분	공사개요	공사비 (천원)	공사기간	비고
전체	-지하차도 U1 ~ U13, B1 ~ B19	**********	*********** ********
1차	-토공 및 가시설 U8 ~ U13, B1 ~ B4 -구조물 U8 ~ U13, B1(기초)	*********	********** ********
2차	-토공 및 가시설 U1 ~ B6 -구조물 U1~U7(기초,벽체), B1 ~ B5(기초) B3, B6, B6-1 (벽체 및 슬라브)	**********	********** ********
3차	-토공 및 가시설 U1~U5 (중첩), A, B (잔여) -구조물 U1~U5(기초및벽체), B1,B2(슬라브)	*********	********** ********
잔여	-토공 및 가시설 : B7 ~ B19 -구조물 : B7,B8(중첩) B01~B13(잔여)	**********	********** ********

○ 3차분 주요공사 현황                                   (단위 : 천원)

공 종		세부공정	수량	단위	금액
중첩 구간	구조물공	거푸집	4,535	㎡	*******
		강관비계,동바리	5,538	공/㎥
		철근가공조립	335	ton
		콘크리트타설	3,174	㎥
		방수	7,250	㎡
	가시설공	터파기	12,647	㎥	*******
		사토운반	12,647	㎥
		H-PILE 박기	133	본
		강재사용료	94.024	ton
	교통안전 시설공	노면표시	1,765	㎡	******
		PC방호벽 이동설치	763	EA
	부대공	가설사무실	142.4	㎡	*******
		품질관리원	12	월
	기타 부대공	시공상세도	176	장	******
		작업용 조명해체	0.5	식

공 종		세부공정	수량	단위	금액
잔여 구간	토공	기존포장깨기	2,500	㎥	******
		사토운반	4,000	㎥
	구조물공	터파기	4,000	㎥	*****
	가시설공	복공판	1,240	EA	*********
		측벽, POST PILE	220	본
		SGR 차수공	5,664	m
	부대공	교통 안내표지판	11	EA	*******
		PE 방호벽	515	EA
	철거공	구조물 헐기	2,234	㎥	*******
	상수관	기존상수관 철거	252	m	*******
직접공사비					*********
PS공종		고재처리비			********
		교통처리용역			******
제요율적용 제외공종		고용개선지원비, 건설안전관리비,사토운반시스템			*******
물가변동액					*******
신월IC 가속차로					*******
간접공사비					*********
도급금액					*********
관급자재구입비					*******
폐기물 처리비					*******
총공사비					*********

Ⅳ		책임기술자 검토의견

○ 3차분은 예산현액 및 현장여건과 총차 예정공정에 맞추어 공정계획을 수립하는 등 발주설계는 적정한 것으로 사료됨

Ⅴ		조 치 계 획

○ 3차분 발주내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 계약부서에 계약의뢰하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 3차공사 발주요청 공문 1부.

2. 3차공사 발주내역서 1부.  끝.