문서번호	도시철도설비부-11273
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
민종배		백성현	12/08 代전계목
협조

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설 전기공사』

설계변경(총차, 1차) 검토·보고

2021. 12.

도시기반시설본부(도시철도설비부)

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설 전기공사』

설계변경(총차, 1차) 검토·보고

진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설 전기공사 시행 중 현장개선 및 효율적인 공정관리를 위하여 설계변경(총차, 1차) 사항을 검토 하고 그 결과를 보고하고자 함.

※ 관련근거: 서현감차량기지 2공구 2021-1955호(21. 12. 07.)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 진접선(4호선연장) 2공구 차량기지 건설 전기공사

□ 공사규모: 차량기지 197,400㎡, 검수고 외 14개동, 진입도로 1.14km 가로등 설치 공사

□ 공사기간: ****************************

□ 시 공 사: ******* 외 1개사

□ 감 리 사: ************

□ 계약금액: ***************

***		*******	*******	***
****		*************	*****************************
**	**	***********	*****************************

Ⅱ		관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)

□ 실정보고 및 승인

❍ 서현감 차량기지2공구 2020-729호(2020. 10. 21.), 도시철도설비부-11877호(2020. 12. 16.)

⇒ 진입도로 가로등 공사 설계변경 실정보고 및 승인

❍ 서현기술단 2021-1758(2021. 10. 20.), 도시철도설비부-9884호(2021. 11. 01.)

⇒ 차량기지 진입도로 교통신호등 설치공사 실정보고 및 승인

□ 설계변경 자문(소)위원회 개회

❍ 2021. 11. 23.: 설계변경 자문 요청(건설사업관리단 ⇒ 본부)

❍ 2021. 12. 06.: 설계변경 자문(소)위원회 결과 보고

Ⅲ		설계변경 내용

□ 주요 변경사유

❍ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의 2(설계서의 불분명ㆍ누락ㆍ오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경), 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 의한 설계변경으로 계약금액 변경

□ 설계변경(계약금액) 내용

❍ 총차 내역변경

(단위: 원)

******		********	*******	************ *******
*** ****	***	*************	*************	***	**********
	***	*************	*************	***	**********
	****	**********	**********	***	**********
******		*************	*************	***	**********
*****		*************	*************	***	*********
*****		*************	*************	***	**********

❍ 1차 내역변경

(단위: 원)

******		********	*******	************ *******
*** ****	***	*********	**********	***	**********
	***	**********	**********	***	**********
	****	*********	*******	***	**********
******		**********	***********	***	**********
*****		**********	**********	***	*********
*****		***********	***********	***	**********

□ 건설사업관리단 검토의견

❍ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의 2(설계서의 불분명ㆍ누락ㆍ오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경), 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따른 설계변경으로,

❍ 진입도로 가로등 설치 건은 설계서 오류, 누락 수정 및 현장여건에 맞게 시공방법을 변경하였고,

❍ 각종 보험료 및 산업안전보건관리비 등은 해당기관에 납부한 금액, 증빙자료를 검토하여 정산처리하였으며,

❍ 또한 교통신호등 설치 건은 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 ************을 적용하였음.

❍ 자문회의 지적사항은 관련 법규 및 시방서에 따라 조치하는 등 적합하게 반영하였음.

□ 보고자 의견

❍ 상기 건설사업관리단 검토의견과 같이 전기공사(1차)에 대하여 설계변경을 진행함이 타당한 것으로 사료됨.

Ⅳ		행정 사항

□ 총차 및 1차 계약에 대하여 설계변경 시행 및 계약 의뢰.

붙임  1. 설계변경 요청(건설사업관리단) 1부.

2. 설계변경(총차, 1차) 내역서 각 1부.  끝.