문서번호	설비부-18458
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김현기	12/16 김호성

「서울공예박물관 본관3층」

공조덕트 추가공사 발주계획

2021.12

도시기반시설본부

(설비부)

- 공예박물관 본관 3층 -

공조덕트 추가공사 발주계획

공예박물관 본관3층 천장 결로 발생 현상을 개선하기 위하여 천장 상부 기류 형성을 위한 공조덕트 추가 설치공사를 아래와 같이 시행하고자 함

□ 추진근거

○ 서울공예박물관 결로발생 외부전문가 자문 및 대책회의결과 알림

[건축부-20437(2021.12.15.)호]

- 결로 완화를 위한 전시실 상부 공조덕트 추가 설치 필요

□ 추진배경

○ ’21.11월 넷째주부터 공예박물관 본관3층에서 천장부로부터 물 떨어짐 현상이 발생하여 긴급 TF 대책회의 후 개선방안 마련

- 본관 지붕위 에어벤트 설치(건축 시공사 시행)

- 본관3층 천장 상부 공조설비 보강(설비부 시행)

- 본관3층 천장 측면 배기휀 설치(공예박물관 총무과 시행)

현장 전경	본관3층 내부	본관3층 바닥

□ 발주계획

○ 공 사 명 : 서울공예박물관 본관3층 공조덕트 추가공사

○ 공사내용 : 천장 상부용 급기 디퓨저 8개 추가설치

○ 계약방법 : 수의계약

- 근거 : 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제5호

- 사유 : 소액이며, 기존 덕트설치한 시공사와 수의계약 추진하여 조속한 공사시행 및 추가공사에 대한 하자책임 명확화

○ 계약업체 :********************

○ 계약기간 : 착공일로부터 ’22.1.17일까지

○ 소요예산 : ***********

○ 예산과목 : 서울공예박물관 총무과, 공예문화 중심지 조성, 공예문화 기반시설 구축, 서울공예박물관 건립(균형발전특별회계)

□ 향후계획

○ 2021.12.16. : 공사발주

○ 2021.12.21. : 공사착수

○ 2022.01.17. : 공사준공

붙임  1. 건축부 대책회의 결과보고 1부.

2. 도면 1부.  끝