문서번호	창업정책과-4031
결재일자	2021. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	남부권창업팀장	창업정책과장	경제일자리기획관		경제정책실장
신재영	고중석	임재근	代정영준		12/17 황보연
협 조
	예산5팀장			박해진

서울창업허브 M+ 조성 예산 변경 계획

2021. 12.

경제정책실

(창업정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울창업허브 M+ 조성예산 변경계획

도기본, 서울창업허브 M+ 조성 공사기간 연장에 따른 감리비 부족예산을 동일 사업 내에서 변경(시설비→감리비) 요청함에 따른 예산변경 계획임

1		추진 개요

□ 추진 근거

○ 서울특별시 마곡산업단지 지원에 관한 조례(’11.7.28. 제정)

○ 서울특별시 창업지원조례 제17조, 제18조

□ 추진 경과

○ 마곡 R&D 융복합 혁신거점 구축 계획 수립(’18.3.)

○ 기본설계 및 실시설계 완료(’18.5.) 및 착공(’18.7.)

○ 임시준공(’21.10.), 준공검사(’21.11.11.), 48개사 입주(’21.12월 현재)

□ 사업 개요

○ 공 사 명 : 서울창업허브 M+ 조성공사

○ 사업기간 : 2018. 08. ~ 2021. 11.

○ 공사방식 : 도시기반시설본부에 의뢰하여 공사시행

○ 공사규모 : 지하 4층 ~ 지상 8층 / 연면적 21,628㎡

○ 소요예산 : *****(토지매입비 별도)

서울창업허브 M⁺ 현황

•위치 : 강서 마곡중앙8로 14(마곡동 771-1)

시 설 명	층 별	주요시설
Creation Zone (공유공간)	지상8층	강당, 피트니스룸 등
Working Zone (기업 사무공간)	지상7층～ 지상3층	입주공간(75개) 등
Partners Zone (협력사 공간)	지상2층	파트너, 운영사무실 등
Innovation Zone (대외협력공간)	지상1층～ 지하1층	공유오피스, 영상회의실 등

※ ’21.11.11. 사용승인

2		예산 변경계획

□ 변경 사유

○ 도기본, 서울창업허브 M+ 공사기간 연장에 따른 예산변경 요청(건축부-19896, 12.7.)

— 공사기간 : ’21. 9.30.→10.30. 연장 (30일간)

— 연장사유 : 코로나19 확진자 발생 및 사업의뢰부서 추가공사 요청 등

○ 감리비, 공사기간 연장에 따른 감리기간 연장으로 부족분 발생**********

(단위 : 천원)

당 초	변 경	부족분
*******	*******	******

□ 변경 내용

○ 변경방법 : 동일사업 내 편성목간 “시설비” 일부를 “감리비”로 변경

(단위 : 천원)

단위사업	세부사업	예산과목		예산현액 (당해예산)	승 인 액		승 인 후 예산현액
		편성목	통계목		증	감
합 계				27,504,341	46,729	46,729	27,504,341
체계적 창업시스템 구축	마곡산업단지 공공지원센터 건립	**************	*******	**********		******	**********
			*******	*******	******		*******

□ 향후 계획

○ 예산 변경 요청 (창업정책과→예산담당관)      : ’21.12월

○ 예산 감․재 배정 (창업정책과→도기본 건축부) : ’21.12월

붙임 1. 예산변경 요구서   1부.

2. 예산관련 협조 요청 공문(도시기반시설본부) 1부.

3. 공사기간 연장 공문(2부). 끝.