문서번호	시설보수과-7752
결재일자	2021. 12. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
정용재		김시련	12/28 장상규
협조

설계변경(1회. 정산) 검토 보고

[2021년 터널 및 복개, 지하차도 일상유지보수공사-성동]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 12.

성동도로사업소

(시설보수과)

설계변경(1회. 정산) 검토 보고

(2021년 터널 및 복개, 지하차도 일상유지보수공사-성동)

우리 사업소에서 시행 중인 『2021년 터널 및 복개, 지하차도 일상유지 보수공사-성동』의 시공물량 증․감에 따른 설계변경을 시행하여  공사 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

공사개요

공 사 명: 2021년 터널 및 복개, 지하차도 일상유지보수공사-성동

공사기간: 2021. 1. 1. ~ 12. 31.

사업개요

○ 콘크리트 포장절단 147m, 교면보수 29.7a, 배수로 정비 330m,

낙석방지망 설치 480㎡, 논슬립 설치 1639m 등

도 급 액: 649,052,600원

도 급 자: ㈜국영이엔씨  대표 김영주

Ⅱ

보고내용

설계변경 사유

▶ 작업지시(1~10차) 결과 시공물량 증 ․ 감에 따른 변경

▶ 추가 공종에 대한 신규 단가 산정 반영

주요 공종 물량 증․감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
철거공	아스팔트 포장절단 등	m	161	147	감) 14
교면보수공	절삭후 아스팔트 덧씌우기 등	a	58	29.7	감) 28.3
배수로 정비	0.2×0.35×330	m	0	330.0	증) 330
신축이음보수공	구조물조인트 등	㎡	163	20	감) 143
낙석방지망 설치	주간, 와이어매쉬	㎡	0	480	증) 480
콘크리트보수공	벽체, t=1mm	㎡	3038	64	감) 2974
논슬립 설치	계단, 평면	㎡	0	1639	증)1639
석재판철거 설치	3×28,2개소	㎡	0	170	증)170

공사비 변경내역

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		849,052,600	816,674,090	감) 32,378,510
도급비	공 급 가 액	578,353,466	698,510,909	증) 120,157,443
	p.s단가(고용개선지원비)	11,694,352	0	감)11,694,352
	부가가치세	59,004,782	69,851,091	증) 10,846,309
	계	649,052,600	768,362,000	증) 119,309,400
관 급 비		100,000,000	48,312,090	감) 51,687,910
이 전 비		100,000,000	0	감) 100,000,000

예산과목

▶ 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물 일상유지보수,

시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ

조치의견

상기 내용과 같이 시공물량 증 ․ 감 및 신규 공종 발생에 따라 『2021년 터널 및 복개, 지하차도 일상유지보수공사-성동』의 설계변경을 시행하여 사업 추진(정산)에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.