문서번호	급수운영과-600
결재일자	2022. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
조봉구	이상환	유동수		01/10 이재호
협 조
	시설관리과장		송병욱
	시설운영팀장		김대용
	주무관		이혜진

2022년 장기사용 배급수관 정비사업 추진계획

2022. 1.

동 부 수 도 사 업 소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2022년 장기사용 배급수관 정비사업 추진계획

관 내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 위험이 높은 배급수관을 정비하여 최적의 관망환경을 조성하고 깨끗하고 안전한 수돗물 공급

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 2030 서울수도정비기본계획(환경부 승인 2015.05.21.)

○ 누수방지과-12180(2021.12.31.)호 「2022년 장기사용 배급수관 정비계획」

□ 추진방향

○ 학교 주변 녹물 및 이물질 출수 등 민원발생 구간 집중 정비

○ 적정 관경 선정 및 배급수관 정비공사 설계지침 반영 철저

Ⅱ		2022년 정비계획

□ 추진목표

○ 사업소별 1단계 추진 계획

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표(㎞)	**	***	***	***	***	***	***	***	***
사업비(백만원)	******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

※ 2022년 총 목표 : *****************

****************************************

□ 2022년 사업대상 선정

○ 정비관종: 시멘트라이닝 덕타일주철관(1984~85년에 매설)

- 녹물․이물질 출수 민원발생 구간 및 누수 다발구간

- 학교주변 우선 집중 정비

□ 배급수관 정비계획

○ 총 괄

구분 구별	계		단위사업(80%이상)			연간단가(20%이내)
	연장	사업비	건수	연장(m)	사업비 (백만원)	연장(m)	사업비 (백만원)
계	*****	*****	**	*****	*****	*****	*****
성동구	*****	*****	*	*****	*****	***	***
광진구	*****	*****	*	*****	*****	***	***
동대문구	*****	*****	*	*****	*****	***	***
중랑구	*****	*****	*	*****	*****	***	***

○ 단위사업 발주계획

연번	공 사 명 (장기사용 배급수관 정비공사)	공사개요		사업비 (백만원)	비 고 (학교명)
		구경(㎜)	연장(m)
*********		******	*****	*****
*	****************	*******	*****	*****	****** *****
*	***************	***	*****	*****	****** ******
*	*****************	******	*****	*****	****** *****
*	****************	*******	*****	*****	******

□ 추진일정

사업계획 수립	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
2022.1.		2022. 2. (안전조사과)		2022. 2. (계약심사과)		2022. 2. (재무과)		2022. 3~4.		2022. 11.

□ 중점 추진사항

○ 중대재해 처벌법 관련 안전관리 강화 계획

- 도급사업 안전확보계획 추진*************************

- 공사 시작 전 감독 주관 하에 사고예방을 위한 안전미팅 실시

○ 철저한 현장조사 및 선제적 기술검토 실시

- 교통현황 및 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 설계단계 부터 공법변경 등 예측 불가능한 상황에 대비한 기술검토  실시(필요시 본청 및 본부 기술검토 협의)

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 보완 최소화 및 심사   지연 방지

- 도로굴착 승인, 교통소통대책  및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 녹물출수, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계 부터 안내문 부착,   홈페이지 공지 등을 통한 충분한 홍보 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 도로굴착사업계획조정 심의 신청 : 2022년 1월

○ 도면심사 : 2022년 1월 27일(누수대응과)

○ 도로굴착승인 신청, 자재사용계획 수립(구매) : 2022년 2월

○ 월별 추진실적 보고 : 매월 7일(누수대응과)

붙임  1. 본부 방침서 1부.

2. 배급수관 정비공사 단위사업 카드 및 위치도 각 1부.  끝.