문서번호	영동대로복합개발추진단-321
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		복합개발토목과장	영동대로복합개발추진단장
나도엽		박운용	01/11 이승석
협 조

- 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 -

정기안전점검 수행기관 지정 계획

2022. 1.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

- 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 -

정기안전점검 수행기관 지정 계획

「건설기술진흥법」제62조제4항에 의하여 발주자가 안전점검 수행기관을 지정하게 되어 있어, 안전점검 수행기관 지정 계획을 수립하여 보고드림.

1		추 진 근 거

○「건설기술진흥법」제62조(건설공사의 안전관리)

- 건설사업자는 발주자가 지정하는 안전점검 수행기관으로 안전점검 업무 수행

○「건설기술진흥법 시행령」제100조의2(안전점검 대상 및 수행기관 지정 방법 등)

- 발주자는 안전점검 수행기관 모집공고를 통하여 작성된 명부에서 안전점검 수행기관을 지정하고, 이를 건설사업자에게 통보

2		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사

○ 위    치 : 코엑스 사거리(9호선 봉은사역)~삼성역(2호선) 사거리 일대 1km

○ 규    모 : 복합환승센터 597m(지하5층), 철도터널 403m

○ 공사기간 : '21. 2. ~ '28. 4.

○ 총사업비 : 1조 7,459억원

3		정기안전점검 시기 및 점검비용

▢ 정기안전점검 시기

○ 터  널 : 굴착 초기단계, 굴착 중기단계, 라이닝콘크리트 치기 중간단계

○ 건축물(복합환승센터) : 기초공사 시공시, 구조체공사 초‧중기 및 말기단계 시공시

○ 10m이상 굴착하는 건설공사 : 가시설공사 및 기초공사 시공시, 되메우기 완료 후

○ 폭발물을 사용하는 건설공사 : 총공정의 초‧중기 및 말기단계 시공시

○ 천공기(10m 이상) : 천공기 조립 완료 후 최초 천공 작업시, 천공 작업 말기 단계시

▢ 공구별 정기안전점검 비용(부가세 포함)

***********************

***********************

***********************

***********************

※「건설공사안전관리 업무수행 지침」·「엔지니어링사업대가 기준」의거 산출, 실시설계 완료시 최종 금액 확정 후 변경 계약(시공사-점검기관) 예정

4		안전점검 수행기관 지정계획

▢ 안전점검 수행기관 지정절차

안전점검 수행기관 모집 및 명부작성	→	안전점검 수행기관 지정요청	→	안전점검 수행기관 지정공고 및 사업수행능력 평가	→	안전점검 수행기관 가격입찰 (나라장터)	→	안전점검 수행기관 지정통보	→	안전점검 수행기관과 계약체결
도시철도 토목부		시공사		영동대로 복합개발추진단		영동대로 복합개발추진단		영동대로 복합개발추진단		시공사

▢ 입찰참가조건

○ 신청자격(※공고일 기준)

-「건설기술진흥법 시행령」제100조의2에 따라 모집공고를 거쳐 작성된 “서울특별시 도시기반시설본부 도시철도국 발주공사 안전점검 수행기관 명부” 등록업체('21.11.13. 서울시 홈페이지 공고)

○ 참가제외조건(※공고일 기준)

- 입찰 참가제한 또는 영업정지 처분을 받은 업체

▢ 평가기준 및 평가방법

○ 안전점검 수행기관 평가기준

-「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」제3장 기술용역 적격심사 세부기준의 추정가격이 5억 원 미만인 P.Q 대상 기술용역의 평가기준 준용

구  분

평  가  기  준

배  점

사업수행능력평가

① 참여기술인 경력·실적

45

평점×0.4

40

② 참여기관 실적(유사용역)

35

③ 신용도

10

④ 업무중첩도

10

입찰가격

평점 = 60 - 4 ×	(	88	-	입찰가격	) × 100
		100		예정가격

60

합  계

100

○ 지정방법

- 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 95점 이상인 자 중에서 선정

- 동일가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 수행능력평가결과 최고점수를 받은 자로 선정하며 수행능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨하여 선정

○ 접수서류

- 안전점검 수행기관 지정신청서 1부

- 안전점검 수행기관 자기평가서 1부

- 서약서 1부

- 사업수행능력평가서

- 사실확인 서류(공고문 참조)

- 참여기술자 관련 서류(자격증명서, 교육이수확인서)

- 업체 관련 서류[사업자등록증, 안전진단전문기관 등록증, 법인인감증명서 및 사용인감계, 법인등기부등본, 위임장(대리인 접수시)] 각 1부

5		추 진 일 정(안)

○ '22. 1.13.~1.19. : 안전점검 수행기관 지정공고(공구별 공고)

- 서울시 홈페이지, 조달청 나라장터 공고(5일간, 긴급공고)

○ '22. 1.26. : 사업수행능력평가자료 접수

○ '22. 1.27.~2. 7. : 사업수행능력평가 및 적격자 선정

○ '22. 2. 8. : 나라장터 입찰등록

○ '22. 2. 9.~2.10. : 개찰, 열람 및 이의신청 접수

○ '22. 2.11. : 지정기관(낙찰자) 홈페이지 공고 및 시공사 통보

붙임  1. 정기안전점검 수행기관 지정 공고문(안) 1부.

2. 세부평가기준 및 양식 각 1부.

3. 정기안전점검 수행기관 지정요청서 각 1부.

4. 도시철도국 발주공사 안전점검 수행기관 명부 1부.  끝.