두 리 공 영  주 식 회 사

y

우07730 서울시 강서구 까치산로4다길 32, 영타운 B02호 / T. 02-2695-8636, F. 02-2695-8646, E dr2695@hanmail.net
문서번호 : DR2021- 120201호 시행일자 : 2021. 12. 02. 수 신 : 서울주택도시공사 귀중 경 유 : 도시공간사업본부 참 조 : 도시환경부	선결			지시
	접수	일자 시간		결재공람
		번호
	처 리 과
	담 당 자
	심 사 자			심 사 일
제 목 : 성동구치소 석면해체 및 시설물 철거공사 계약기간 연장 요청의 건
1. 귀 공사의 업무협조에 항상 감사드립니다. 2. 귀 공사가 발주하여 도급계약 체결 된 성동구치소 석면해체 및 시설물 철거공사의 계약기간은 2020. 12. 12 ~ 2021. 12. 11입니다. 3. 환경영향평가법에 따라 성동구치소 전략 및 소규모환경영향평가 협의완료(2021. 07. 28)후 공사착공으로 인해 공사기간의 연장(2021. 12. 11 ~ 2022. 12. 10)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 두리공영 주식회사 대표이사 정 철 호