투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(동북선[1·2공구] 공정회의 결과 알림)

1.업무지시현장 : 동북선 도시철도 민간투자사업[1공구] 금호건설 주식회사, 동북선 도시철도 민간투자사업[1공구] 주식회사 동해종합기술공사, 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 주식회사 호반산업, 동북선 도시철도 민간투자사업(2공구) 주식회사 수성엔지니어링, 동북선 도시철도 민간투자사업[1공구] 동북선도시철도주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-01-13 17:01:31

3.지 시 내 용

동북선 도시철도 민간투자사업[1·2공구]의 원활한 공정관리를 위해 실시한 공정회의 결과를 알려드리니 회의시 논의된 사항이 이행 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 회의결과(본부 당부사항)

○ 공기지연 대책 및 안전사고 예방을 위한 본부 당부사항

- 향후 후속공정(시스템분야 등)에 차질이 발생하지 않도록 연속적인 진도관리 추진

· 사전 지장물 이설 등 관련기관 협의 완료 후 공사관리 추진(전 현장)

※ 진도관리 지연 및 타 지장물 손괴 방지

· 지하철 공사 숙련된 전문인력 및 장비 추가 투입 검토(공기촉진)

· 인접 상가 민원 해소방안 마련 후 공사 추진(사전 민원 예방)

※ 공사 중 민원발생 시 지연 손실

- 안전사고 예방을 위한 건설공사장 안전관리 철저

· 계측자료와 연계한 통합 터널시공위험도 관리시스템 도입 검토

▶ 막장지보재 시기(붕락방지) 사전예방 철저히 관리(강남순환도시고속도로 건설공사 적용 후 터널막장 안전사고 예방 및 경제적 파급효과)

※ 터널 붕괴사고(심리적불안감해소)의 사전 인지율 향상을 위한 공기 및 공사비 손실 최소화 필요(특히, 동북선 하천횡단 및 터널 전구간 적용 필요)

※ 도심지 대심도 터널건설 영향평가 가이드라인,구리시 땅꺼짐 사고조사 보고 참조활용)

· 집중우기시 지하수 상승에 대한 정거장 ?막이가시설 배변 차수 보강 및 배수관리 철저(배면 토사유출 방지 및 땅꺼짐 예방)

▶ 어스앵커 안전율 확인 및 계측관리 철저(허용응력 설계도면 표기, 계측관리자 명확히 전달 필요)

▶ 막이 가시설 부재(띠장 말뚝 등) 및 계단(통로) 시설에 대한 주기적 안전점검 철저(H-Pile 관입 및 항타 시 수직도, 좌굴 방지 등)

· 주변 인접건물 지반침하 및 건물균열, 소음진동 최소화를 위한 계측관리 철저

▶ 서울지하철 계측관리요령 개선, 지하구간 건설공사장에 의한 소음·진동 관리방안 제시 연구보고서 참조 자료 활용)

- 위험성평가 관련 지침 및 해설서를 숙지하여 현장에서 실질적인 위험성평가가 이루어 질 수 있도록 관리(KOSHA 건설업공종별 위험성평가모델 숙지)

- 공사 중 발생되는 민원에 대하여 악성민원으로 변질되지 않도록 적극적인 대처.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김진호			동북선2과장					김현기					도시철도사업부장					01/14 이철
협조자				주무관						안대호					주무관							왕태현
시행			도시철도사업부-512									(						)		접수											(						)
우	04520					중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 9층															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02)772-7187						/전송			02)772-7305					/	kimjinho@seoul.go.kr												/	부분공개(5)