문서번호	도시철도토목부-789
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김윤수		권순환	01/21 최병훈
협 조	공사지원과장			조병연
	차량과장			배광희
	시설전기과장			백성현
	설비공사과장			이광주
	주무관			김민수

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사 감독권한대행 등』

건설사업관리용역 발주계획 보고(4차)

2022. 1.

도시기반시설본부

도시철도토목부

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사 감독권한대행 등』

건설사업관리용역 발주계획 보고(4차)

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사』의 원활한 사업관리를 위해

시행중인 감독권한대행 등 건설사업관리용역(4차) 발주계획 검토 보고임

※ 관련근거 : 서현기술단-22-0086호(2022.1.17.)

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사

감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2018.12.1. ～ 2026.2.28.(3차 ‘21.1.1.~’22.1.31.)

○ 도 급 비 : 7,652,680천원(3차 761,000천원)

○ 도 급 자 : ㈜서현기술단외 4개사

- 토  목 : ㈜서현기술단, ㈜동해종합기술공사

- 건축·기계·검수 : ㈜종합건축사사무소 근정

- 전  기 : ㈜신우디엔시

- 소  방 : ㈜신화에프이원

계약현황

(단위 : 천원)

구분	총 괄	1 차 (준공)	2 차 (준공)	3 차 (진행중)	4 차 (금회)	향 후
계약금액	7,652,680	451,000	514,250	761,000	1,238,000	4,688,430
(금액비율)	100%	5.89%	12.61%	22.56%	38.73%	61.27%
용역기간	`18.12.1. ~`26.2.28.	`18.12.1. ~`19.12.31.	`20.1.1. ~`20.12.31.	`21.1.1. ~`22.1.31.	`22.2.1. ~`22.10.6.	`22.10.7. ~`26.2.28.

Ⅱ		발 주 계 획

❍ 용역기간 : ’22.2.1. ~ ’22.10.6.(8.14개월)

❍ 용역금액 : 금1,238백만원

❍ 투입인원 : 85.202인·월(상주 68.162인·월 / 기술지원 17.040인·월)

구 분	분야	등급	인원	투입인월	투입기간	비 고
건설사업 (상주)	토목	특급	1	9.670	‘22.2.1.~’22.10.6.
		중급	1	6.756		안전
		초급	2	10.664
	건축	고급	1	8.140	‘22.2.1.~’22.10.6.
		중급	2	13.512
	기계	고급	1	8.140	‘22.2.1.~’22.10.6.
	전기	고급	1	8.140	‘22.2.1.~’22.10.6.
	검수	고급	1	3.140	‘22.7.1.~’22.10.6.
	계		10	68.162
	사무보조		1		‘22.2.1.~’22.10.6.
기술지원	상주인원 20%		9	17.040	‘22.2.1.~’22.10.6.

※ 중대재해처벌법 관련 공사장 안전관리 강화계획에 따른 안전감리원 추가배치로 인한 ‘22년도 감리예산 부족분은 추경예산 반영 또는 시설비 통계목 변경예정

Ⅳ		조 치 계 획

❍「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사」의 원활한 추진을 위하여 아래와

같이「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업

관리용역(4차)」을 시행하고자 함.

(단위 : 천원)

구 분	계약기간	계약금액	비 고
4차	2022.2.1. ~ 2022.10.6.	1,238,000

※예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선연장) 차량기지 건설,

시설비 및 부대비, 감리비

❍ 건축·기계·전기·검수·소방분야는 부서별 계획에 따라 건설사업관리기술인 운영

붙임  1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 발주내역서(4차) 1부.

3. 관련서류 1부.  끝.