코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간 변경 의뢰[청년 쿡 비즈니스센터 조성공사 설계용역(전기‧통신‧소방(전기))]

1. 미래청년기획단-1072(2022.1.24.)호 관련입니다.

2. 청년 쿡 비즈니스센터 조성공사 설계용역[전기‧통신‧소방(전기)]과 관련하여 아래와 같이 계약기간 변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 계약건명	: 청년 쿡 비즈니스센터 조성공사 설계용역[전기‧통신‧소방(전기)]

- 계약업체 : 주식회사 중민 대표 이준규

- 계약금액 : 금7,986,000원(금칠백구십팔만육천원)

- 변경내용

구분	변경 전	변경 후	비고
계약기간	2021. 11. 19. ~ 2022. 1. 27.	2021. 11. 19. ~ 2022. 2. 15.	-

- 귀책사유 : 해당사항 없음

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유 : 서울시 청년 쿡 비즈니스센터 조성 관련 설계 중 운영‧공간 구성 협의 등 일정기간 소요되어 설계 지연됨에 따라 청년 쿡 비즈니스센터 조성공사 설계용역[전기,통신,소방(전기)]의 용역기간을 연장하고자 함

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

							미래청년기획단장
주무관							천희준			청년공간조성팀장					이희정					청년사업반장					01/25 이영미
협조자
시행			미래청년기획단-1119									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)															/			https://www.seoul.go.kr
전화								/전송								/													/	부분공개(5)