문서번호	정수시설과-507
보존기간	년
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		김기윤	02/24 문인기
협 조
	주무관			김동석
	주무관			한미경

제2정수장 약품저장동 증설공사 시행계획

2022. 2.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

제2정수장 약품저장동

증설공사 시행계획

우리 정수센터 제2정수장 약품저장동의 응집제(PAHCS) 저장용량이 관련법에 따라 증량(당초 22일→ 30일 보관량)이 필요한바, 다음과 같이 증설공사 시행하여 약품관련 원활한 물생산·공정 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2020년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 계획(정수시설과-230, ‘21.02.26.)에 따른 탱크 저장시설 확장.

☞ 응집제 저장 용량 시설기준이 당초 22일에서 30일로 변경됨에 따라 60㎥ 저장탱크 추가확보 필요

○ 약품저장동 증설공사 시행계획 방침(정수시설과-1723(2021.07.01.)

○ 증설현황(위치, 용량)

￭ 설치대상 저장탱크(60㎥)

￭ 기존 2층과 연계한 증설(저장공간 확보)

기존시설

□ 증설공사 개요

○ 주요 사업내용

- 철골조 약품저장동 증설 A=40㎡(5×8m), h=8m(2층)

○ 규 모(주요자재)

- 구조 : H-beam(철골조)           - 외장 : 알루미늄복합판넬

- 지붕 : 260T 불연 그라스울 판넬  - 내부바닥 : 무근콘크리트 및 내산 라이닝

- 탱크 : FRP 원통 입형(60㎥)(관급)

□ 추진방안

○ 설계용역 추진

- 용 역 명 : ’22년 구의아리수정수센터 제2정수장 약품저장동 증설공사 용역설계

- 용역기간 : 착수일로부터 45일

- 주요과업 내용

▸ 철골조 A=40㎡(5×8m), h=8m(2층), FRP 원통 입형(60㎥)

▸ 상재하중 및 기초지지력 산정에 의한 슬라브 두께 및 강골조 규격

▸ 외장 및 내장 마감재 선정(천장 및 벽체)

▸ 화학물질관리법에 따른 화학물질 배관 및 전열설비 등

▸ 건축인허가 사항 및 기타 발주기관이 필요하다고 요구하는 사항

- 소요예산 : ************

- 계약방법 : 전자공개수의계약

○ 본공사 추진

- 공 사 명 : ’22년 구의아리수정수센터 제2정수장 약품저장동 증설공사

- 공사기간 : 착공일로부터 180일

- 주요 공사내용

▸ 철골조 A=40㎡(5×8m), h=8m(2층), FRP 원통 입형(60㎥)

▸ 기초공사, 철골조 공사, 판넬(지붕)공사, 기타 전기(배선) 및 배관설비공사

※ 전기(배선)공사 별도 시행

- 소요예산 : *************

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)

□ 향후 추진일정

○ 기술용역 타당성 심사(본청 기술심사담당관) : ’22.02.22. ~ 02.28.

○ 설계용역 추진 : ’22.03.01. ~ 04.15.

○ 설치공사 추진(본부 설계심사) : ’22.04.20. ~ 10.30.

○ 증축동 건축물관리대장 등재 : ’22.11.10.

붙임 : 1. 약품저장동 증설공사 시행계획(방침서) 1부.

2. 20년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 계획 1부.

3. 20년 수도시설 기술진단 결과보고 및 개선방안(요약서) 각1부.

4. 증설공사 설계용역 설명서, 설계내역서, 과업지시서 각1부.  끝.