문서번호	시설관리과-4097
결재일자	2022. 3. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정재형		유광창	03/01 송병욱
협조

상수도시설물 작업지시(77, 78, 88) 작업 보류

2022. 2.

시설관리과

2021년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 용마배수지 외 4개소

○ 작업내용: 타일보수, 방화문교체, 균열보수, 누수보수, 노후밸브교체 등

○ 작업기간: 2022. 1. 11 ~ 2022. 2. 28.

□ 작업지시 보류

○ 작업지시 번호 77번, 78번에 대해 용마배수지 내부 방식공사와 연계 정비 및  시설물 보수·보강 여부를 보다 면밀히 조사 후 정비 필요하여 작업지시 보류

○ 작업지시번호 88번은 식당가 민원으로 공사 보류

○ 작업지시 내역 : 용마배수지, 용마소배수지내 균열, 단면보수 등 구조물 정비

○ 보류사유 : 용마배수지 내부방식공사와 연계 필요 및 보수·보강방법 재조사

□ 조치계획

○ 작업지시에 대하여는 작업지시 보류하여 원활한 시설물 관리에 만전을  기하고자 함.