“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장 (안전조사과장)
(경유)
제목	설계변경 심의 요청(2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사(최종))

우리 정수센터에서 시행중인「2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(계약금액 조정) 심의를 요청합니다.

가. 공 사 명 : 2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2021.09.07. ~ 2022.07.30.

다. 계약금액 : 201,244,870원

구분	당초금액	변경금액	증감액	비고
도급액	201,244,870	278,800,000	증)74,555,130

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 고용산재 완남증명서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	성민제		정수시설과장	04/07
이재복
협조자
시행	정수시설과-20282	(	2022.04.07	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5348	/전송	02-3146-5309	/	smj6930@seoul.go.kr	/	대시민공개