문서번호	물재생계획과-21242
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수악취저감팀장	물재생계획과장
이진숙		한차순	04/13
			박홍봉
협 조	하수계획팀장			代김병오
	하수관리팀장			정한영
	물재생운영팀장			김태환
	치수설비팀장			박시현
	하천생태팀장			이한복

하천변 토구 2차 현장점검 결과보고

2022. 4.

물순환안전국

(물재생계획과)

하천변 토구 2차 현장점검 결과보고

하천변 토구 자치구 일제점검 결과 최근 3년간 악취민원이 발생한 토구에 대해 2차 합동점검을 실시하고 결과를 보고드림

토구 합동점검 개요

□ 추진근거: 하천변 토구 일제점검 결과 및 정비계획(물재생계획과-3207, ’22.3.14.)

□ 점검일자: 2022. 3. 21. ~ 3. 30.

□ 점검대상: 자치구 1차 현황조사 결과 최근 3년 이내 악취민원 발생지점의 악취저감시설 설치 또는 우수토실 개선 대상 토구 35개소

□ 점검방법: 시·자치구·외부 전문가 합동점검

- 외부 전문가: ***************************************

□ 점검내용: 악취저감시설 설치, 우수토실 구조개선 필요성 등 현장조사

점검일자	자치구	하천명	관리번호	점검자
3. 21.	성동구	중랑천(2)	뚝도-L-1, L-2	하수계획팀, 하수악취저감팀, 자치구 치수과, ********
3. 21.	성북구	성북천(2)	성북-L-16, L-21
3. 21.	도봉구	방학천(2)	방학-L-13, 방학-L-14
		우이천(2)	우이-L-5, 우이-L-23
		중랑천(1)	중랑-R-2
3. 22.	송파구	성내천(4)	성내L-003, L-013, L-018, R-023
		탄천(1)	탄천R-006
3. 23.	서초구	반포천(10)	반포 우-02, 우-03, 우-04, 우-05, 우-06, 우-07, 우-08, 우-09, 우-10, 우-11	하수악취저감팀, 자치구 치수과, ********
3. 30.	구로구*	목감천(2)	개화 우-04, 우-05	하수관리팀, 하수악취저감팀, 자치구 치수과, ********
		도림천(4)	도림 우L-02, 우L-03 우L-04, 우L-05
		안양천(4)	안양 우L-10, 우L-11, 우R-03, 우R-04
3. 30.	영등포구	도림천(1)	도림 우 R-03

* 구로구 하천변 토구 10개소: 우수토실 구조개선 점검대상

토구 합동점검 결과

□ 악취저감시설 설치 및 구조개선 등 검토대상 토구: 35개소

자치구	하천명	관리번호	현장조사 결과	전문가 의견(개선방안 등)	검토부서
성동구	중랑천(2)	뚝도-L-1	********* ***** ***************	********************	물재생계획과 물재생시설과 하천관리과
		뚝도-L-2		********************
성북구	성북천(2)	성북-L-16	******** ****************	******************* ********************	물재생계획과 물재생시설과
		성북-L-21	***** ****************	******************* ********************
도봉구	방학천(2)	방학-L-13	***** ****************	******************* *********	물재생계획과
		방학-L-14		********'************ ********* ********************	물재생계획과 물재생시설과
	우이천(2)	우이-L-5		******************* ********************
		우이-L-23		****************** ********************
	중랑천(1)	중랑-R-2		****************** ********************
송파구	성내천(4)	성내L-003	***** ****************	*******'************	물재생계획과
		성내L-013	***** **************** *************	********'************
		성내L-018		********'************
		성내R-023		********************	자치구 치수과 자체 처리
	탄천(1)	탄천R-006	********* ***** ***************** *************	**************** ************ **************	물재생계획과하천관리과

자치구	하천명	관리번호	현장조사 결과	전문가 의견	검토부서
서초구	반포천 (10)	반포 우-02	***** ***********	**********	물재생계회과 물재생시설과 하천관리과 (※ 반포천 하천기본계획 수립 중)
		반포 우-03	*****	******************
		반포 우-04	******** ******************	****** **************
		반포 우-05	*****	******************
		반포 우-06		******************
		반포 우-07		******************
		반포 우-08	***** **********	******
		반포 우-09		******
		반포 우-10	***** ******************	****** **************
		반포 우-11	******** ********** ******************	****** ************** ******************
구로구*	목감천(2)	개화 우-04	***** ********	**************	자치구 치수과 자체 처리
		개화 우-05	*****	**************** ************
	도림천(4)	도림 우L-02	******** ********	***************** *************
		도림 우L-03	***** ********	********'************	물재생계획과
		도림 우L-04	***** ************	*******'************
		도림 우L-05	************* ***** ************	************'*********** *****************'*********** **************	물재생계획과 물재생시설과 하천관리과
	안양천(4)	안양 우L-10	*********** *****	****** **************
		안양 우L-11	********* ***** *************	**************	자치구 치수과 자체 처리
		안양 우R-03	********* *****	************* ************	하천관리과 자치구 치수과
		안양 우R-04	********* ***** ****************************	******************* ***********
영등포구	도림천(1)	도림 우 R-03	********* ********* *****************	******************** **************

토구 합동점검 결과 조치계획

□ 악취저감시설 설치대상 토구: 7개소

☞ 성북천 2개소, 방학천 2개소, 우이천 2개소, 중랑천 1개소

- (1단계) 악취조사 실시 후 악취저감시설 설치 검토(물재생계획과 하수악취저감팀): '22. 4.~6.

※ 단, '22.4. 가림막 정비예산 배정한 도봉구 방학천 토구 2개소는 가림막 정비 후 악취조사

- (2단계) 악취저감시설 설치계획 수립: '22. 7.

- (3단계) 악취저감시설 설치 예산 자치구 배정 및 사업시행: '22. 8.~12.

□ 우수토실 구조개선 등 검토대상 토구: 15개소*

☞ 중랑천 3개소, 성북천 2개소, 방학천 1개소, 우이천 2개소,

탄천 1개소, 반포천 2개소, 도림천 2개소, 안양천 2개소

- (1단계) 우수토실 구조개선 등 사업시행 여부 검토(물재생계획과 하수관리팀): '22. 4.~5.

- (2단계) 우수토실 등 구조개선 사업계획 수립․추진(시설물 관리부서): '22. 6.

※ 총 구조개선 등 검토대상 토구 18개소: 물재생계획과 2차 현장점검결과 15개소*

+ 물재생시설과 2차 우수토실 점검결과 3개소**(물재생시설과-20089호, 2022.3.23.)

․ 3개소**: 정릉천(R-21), 홍제천(R-38), 도림천(신림교 하부)

<반포천 관련 검토사항>

- 반포천 사당천 하천기본계획 수립 중으로 구조개선(2개소) 및 환경(악취) 개선 필요 사항은 기본계획 수립 용역에 반영되도록 조치(하천관리과 하천생태팀)

	<반포천 사당천 하천기본계획 수립 용역>
▸ 용역기간: '21.11.1.~'23.4.24.(1차: '21.11.1.~'21.12.31.) ▸ 계약금액: 1,115백만원(1차: 500백만원) ▸ 용역사: ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

행정사항

□ 외부 전문가 자문 수당 지급: 800천원(2인×200천원×2일)

- 사업예산, 하수시설관리, 하수도관리, 하수도 악취 저감 추진, 일반운영비, 사무관리비

붙임  전문가 자문의견서 2부.