문서번호	기전과-21200
결재일자	2022. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박근용		박신범	04/15
			김은덕
협조

『거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

실정보고 및 설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  4.  15.

동부도로사업소

(기 전 과)

『거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

실정보고 및 설계변경(정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행하는 『거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치』 관련하여 계약업체으로부터 제출된 설계변경(정산) 보고서를 검토하고 보고 드림.

□ 관련근거

○ ***********************************

: 거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치 실정보고 및 설계변경(정산) 보고서 제출

□ 사업개요

○ 사 업 명: 거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치

○ 사업위치: 거여본선(송파구 오금동 165-1, 가락동 165-2, 거여동 11-6, 20-14)

○ 취 수 원: 거여본선 지하철 환기구 집수정 내 유출 지하수

○ 사업규모: 총 연장 300m

○ 계약업체: ***************************************

○ 계약금액: *************

○ 계약기간: ***************************

○ 사업내용: 거여본선 쿨링로드 설계, 시스템 물품 제조 및 설치

□ 설계변경 금액

구 분	총 공 사 비	변 경 전	변 경 후	증 감 액		비 고
도급비	**********	***********	***********	**	********
	*********	**********	**********	**	*******
	************	***********	***********	**	********	******

□ 실정보고 및 주요 변경 내용

구 분	현황 및 문제점	검토 의견	검토 결과	비 고
거여본선 쿨링로드 물품 제조 및 설치	1. 아스팔트 횡단 지중 배관의 선통 불가로 도로환경측정스테이션의 위치 변경 필요	1. 도로환경측정스테이션의 설치 위치 변경(P1 → P2)	적 정	물량 및 설치금액 증감 없음

□ 보험료 및 제경비 정산

구 분	정산 항목	변 경 전	변 경 후	증 감 액		비 고
설치 공사	산업안전보건관리비	170,568원	-	감)	170,568원
	퇴직공제부금비	36,800원	-	감)	36,800원
	국민건강보험료	54,880원	-	감)	54,880원
	노인장기요양보험료	6,322원	-	감)	6,322원
	국민연금보험료	72,000원	-	감)	72,000원
	환경보전비	24,630원	-	감)	24,630원
	일반관리비	326,516원	306,640원	감)	19,876원
소 계				감)	385.076원
부가가치세				감)	38,508원
합 계				감)	423,584원

□ 보고자 검토의견

○ 계약업체로부터 접수된 실정보고 및 설계변경(정산) 보고서에 대하여

검토한 결과 계약업체 의견이 적정한 것으로 판단되어 상기와 같이

승인하고 설계변경 의뢰를 시행하고자 함.

붙임  1. 실정보고 및 설계변경(정산) 보고서 1부.

2. 설계변경 전후 도면 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 검증확인서 2부.

5. 합의각서 1부.  끝.