문서번호	기전과-21024
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
안재윤		04/29
		문동하
협조

『횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사』

준공기한 연기 검토 보고

2022. 04.

성동도로사업소

(기 전 과)

『횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사』

준공기한 연기 검토 보고

횡단보도 확충정비사업(답십리동 276-6 주변 사거리) 교통신호기 공사 준공기한 연기요청에 대하여 검토하여 보고 드림

□ 관련근거

○ 진명전기 제 22-0420-01호

- 횡단보도 확충정비(답십리동 276-6 주변 사거리) 교통신호기 공사 설계변경 제출건

□ 공사개요

*************************************************

***********************

**********************

*****************************

****************************************

********

********************************************

**********************************************************************************************************************************

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기 사유

- 선행공정인 동대문구청 도로과 토목공사 지연으로 인한 공기 부족

○ 변경내용

***	****	****	*****	**
*******	************* ***************	************* ***************	***

○  지체상금 부과여부 : 미부과

□ 검토의견

○ 검토결과 사유가 타당하여 상기와 같이 준공기한을 연기하고자 함

붙임 1. 시공사 준공기한 연기요청 공문 각 1부

2. 합의각서 1부.  끝