문서번호	시설보수과-21345
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		05/04
		임형규
협 조
	주무관			최선보
	주무관			강연홍
	주무관			주영진

작업완료보고(제2022-1차)

2022년 도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

작업완료보고 (제2022-1차)

2022년 도로시설물 일상유지보수공사 (교량,고가등)

“2022년 도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)”제2022-1차 작업완료보고에 따른 검토결과 보고임

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2022년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가등)-강서

❍ 공사개요 : 총 36개시설(교량22,고가7,입체교차7)

❍ 공사기간 : 2022.01.27 ~ 12.31

❍ 계약금액 : 1,041,965천원

❍ 계 약 자 : 경산엔지니어링㈜ 대표 박장호

❍ 공 정 율 : 20%

□ 작업지시 완료 내역

❍ 관련근거

차수	작업지시		작업완료		비고
	관련근거	작업기간	관련근거	접수일
1차	시설보수과-20122 (2022.3.25)	2022.03.28 ~ 4.30	경산 강서-22-05	2022.4.28

❍ 1차 작업지시 및 완료 내용

- 대상시설 : 목동교외 3개시설

- 개략공사비 : 37,213천원

- 세부작업내역

연번	시설명	위치 및 손상내용	작업완료내역	수량			단위	작업조건
				당초	완료	증,감		주간	야간
1	목동교	A3하부	단면보수	3.3	3.3	-	m2	○
			빗물배수관 설치	9	9	-	m	○
		A1벽체	표면보수	138.4	138.4	-	kg	○
			균열보수	10	10	-	m2	○
2	고척교	포장부	차선도색(야간),융착식	3,215	3,516	증)301	m		○
3	역곡천교	포장부	차선도색(주간),융착식	405	405	-	m	○
4	개화교	중앙분리대	단부설치, 3t	2	1	감)1	EA	○

□ 주요 점검사진

❍ 완료보고(제1차) 점검사진

1작업완료 표면보수 (목동교)	1작업완료 빗물배수관 설치 (목동교)	1작업완료 차선및노면도색 (고척교)	1작업완료 중앙분리대 단부설치 (개화교)

□ 조치계획

❍ 제1차 작업완료 보고 사항에 대한

- 부제별 주요공종 시공상태 등 현장점검(확인)결과 이상없이 적정시공 완료됨.

❍ 작업완료 보고된 신규공종 및 물량(증·감) 사항에 대하여 향후 설계 변경 시

반영 조치코자 함.

따로붙임  작업완료보고(제1차)서류 일체 1부(별첨).  끝.