문서번호	시민봉사담당관-31318
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		120관리팀장	시민봉사담당관
김태한		이권석	09/23 원권식
협조
	응답소팀장		김인호

응답소 운영서버 구축완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시민봉사담당관

- 응답소 서비스의 안정적인 운영을 위한 -

응답소 운영서버 구축완료 보고

응답소 서비스의 안정적인 운영환경 확보와 서비스 품질향상을 위한 응답소운영서버 구축사업이 완료됨에 따라 구축현황을 보고하고 향후 응답소 서비스의 원활한 이전에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 노후화 장비 교체 및 장비추가 계획(시민봉사담당관-28826, 2013.7.29.)

○ 응답소 운영서버 구축 계획(시민봉사담당관-15276, 2014.4.29.)

□ 추진개요

○ 사업명 : 응답소 운영서버 구축사업

○ 계약금액/계약업체 : 154,189,380원 / 대신네트웤스(주)

○ 사업기간 : 2014.7.17.~8.30.

○ 사업내용

- 응답소운영서버 2식, SAN 스위치 2식, 상용 SW(Web/WAS) 2식 구매

- 응답소 시스템 운영환경 조성

□ 추진경과

○ 2014.7.17.	낙찰업체 선정

○ 2014.8.6.~12.	시스템 구축환경 조사

○ 2014.8.27.~29.	시스템 납품/설치

○ 2014.8.29.~9.10.	운영테스트

○ 2014.9.11.	검수완료

□ 응답소 운영서버 구축현황

○ 도입장비

구 분	제조사	사 양	비고
운영서버	HP	CPU : 2.5Ghz 8Core Memory : 64GByte Disk : 300GB * 2
SAN스위치	HP	2/4/6/8Gbps 24Port
Web 서버	TMAX	WebToB 4.x
WAS 서버	TMAX	JEUS 6

○ 네트워크 구성도

○ 서버운영 설정 사항

- 서버 OS 설치 및 최신버전 패치, 네트워크(로컬, 가상 IP) 설정

- TMAX6 계정 추가 및 JEUS, WebToB 설치, 기존 운영환경설정 이전 및 동작 테스트

- ORACLE 클라이언트 설치, 기존 환경설정 이전 및 DB 연결 테스트

- 응답소 서비스 이중화를 위한 L4, L2연결 및 설정

- 기존 응답소 소스 이전 설치

- SAN 스위치 연결 및 그룹 설정

□ 향후조치사항

○ 응답소 운영용 서버 인증서 신청/설치(응답소팀)

○ 응답소 서비스 환경설정 및 운영테스트(응답소팀)

○ 응답소 서비스 이전 계획 수립/시행(응답소팀)

○ 응답소 운영관리 서버 유지관리(응답소팀)

○ 서버/네트워크 및 서비스이전 지원(120관리팀)