투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	선유도공원 산책로 주변 재정비공사 설계변경 시행

1. 여의도공원관리사무소-22012호(2022.5.30.)와 관련입니다.

2.「선유도공원 산책로 주변 재정비 공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

가. 공사명 : 선유도공원 산책로 주변 재정비 공사

나. 위  치 : 선유도공원 산책로(온실~카페), 녹색기둥의정원 일대

다. 공사개요

1) 시설공사 : 흙콘크리트 포장

2) 식재공사 : 꽃복숭아 18주

라. 공사기간 : 2022. 4. 1. ~ 5. 31.

마. 도 급 자 :************

바. 공사금액

구 분		공사비(단위: 원)			비고
		당초	변경	증감
도급비	공급가액	**********	**********	*******
	부가가치세	*********	*********	******
	계	**********	**********	*******

사. 변경사유 : 공사현장 여건에 따른 공종 및 물량 변경

아. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 여의도공원관리사무소, 세계적인환경·생태테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 시설비및 부대비, 시설비

붙임  1. 변경내역서(산책로) 1부.

2. 검증확인서(산책로주변재정비공사) 1부.

3. 선유도공원 산책로 주변 재정비공사 설계변경 계획 보고 1부.  끝.

	여의도공원관리사무소장
공원팀장	박미란		여의도공원관리사무소장	05/31
허생범
협조자	재무팀장	정미숙
시행	여의도공원관리사무소-22031	(	2022.05.31	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로343 선유도공원관리사무소	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-2631-9368	/전송	02-2631-9373	/	orchid@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)