문서번호	물재생계획과-23930
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	代박영호	06/10
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고(서초구)

2022. 06.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

「********* 외 3개소 하수관로 개량공사」 추진중 사업구간내 지장물(도시가스) 저촉으로 이설비 추가 발생에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 사업규모 : 하수관로 개량 D450~600㎜, L=633m

○ 공사기간 : 2022. 3. ~ 7.

○ 예산현황                                                        (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	************** *******	*******	*******	******	*************** ***************

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 하수관로 개량구간내 지장물(도시가스) 저촉에 따른 이설비 증가

- 사업규모 : 도시가스 본관 이설 MB PLP 50A, L=19m

- 소요공사비 : **************************

Ⅳ		검토 의견

○ 하수관로 개량 구간내 지장물(도시가스) 저촉으로 추가 이설비가 소요되는 사안으로 본 공사의 낙찰차액을 활용하여 신속하게 추진함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정(시 → 서초구)

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	************** *******	*******	*******	******	*************** ***************

붙임 : 관련공문 및 증빙자료 각 1부.  끝.