“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(3회 최종) 시행(2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사-장기계속단가계약)

1. 우리사업소에서 시행중인『2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속 단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회 최종) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속 단가계약)

나. 수 급 인: 승지토건(주) 이승행

다. 계약기간: 2021. 5. 14 ~ 2022. 6. 30

라. 계약금액(도급비)

1) 2차수 금액변경 내용(2022년도)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	4,856,228	15,771,326	증 10,915,098	아스팔트포장절단 등
부설공	8,517,463	29,562,866	증 21,045,403	스텐관부설공 (D=20mm)등
구조물공	179,864,738	188,131,588	증 8,266,850	몰탈바르기(바닥) 등
부대공	22,980,514	15,269,125	감 7,711,389	기어박스 점검,정비 등
사급자재비	4,308,082	10,572,003	증 6,263,921	부단수활정자관 등
포장공	5,105,639	7,116,319	증 2,010,680	보조기층공 등
부가세 및 요율	192,856,336	149,728,773	감 43,127,563
합 계	418,489,000	416,152,000	감 2,337,000

2) 차수별 부기금액 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	총 부기금액	667,562,000	665,225,000	감 2,337,000
	금차(2022년)	418,489,000	416,152,000	감 2,337,000

마. 설계변경 사유: 신규공종 발생및 계약물량 증·감

바. 최대이행금액: 350,000,000원(변경없음)

사. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비(배수지등 정밀안전진단 점검및 시설정비(시설정비))

- 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수비, 시설비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망 개선)

붙임 1. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고 1부.

2. 사전심의 의결서 1부.

3. 설계변경 내역서(3회 최종) 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.

5. 변경합의서 1부. 끝.

주무관	김철수		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	이준호		서부수도사업소장	06/13
김정일
협조자	주무관	구자람		행정지원과장	박달경
시행	시설관리과-24537	(	2022.06.13	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3713	/전송	02-3146-3739	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	부분공개(6)