문서번호	물재생계획과-24313
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	06/20
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (양천구)

2022. 06.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (양천구)

「신정네거리역 주변 외 2개소 하수관로 조사 및 실시설계용역」 추진중 노후·불량 하수관로 CCTV 촬영 및 노선측량 물량 증가에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 사업규모 : 하수관로 조사 및 실시설계 D450~1000㎜, L=3,701m

○ 공사기간 : 2022. 2. 23. ~ 6. 22.

○ 예산현황                                                        (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	************ ************	*******	*******	******	**************** ***************

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 노후 하수관로 증가에 따른 CCTV 촬영 및 노선측량 수량 증가

- 사업규모 : 관로조사 당초)2,311m→변경)3,568m, 측량 550m(증)

- 소요사업비 : *************************

********************************

Ⅳ		검토 의견

○ 본 용역 추진과정에서 노후·불량 하수관로 수량이 증가함에 따라 CCTV 촬영 및 노선측량 비용이 추가로 소요됨에 따라 본 용역의 낙찰차액을 활용하여 신속하게 추진함이 타당하다 판단됨.

- 노후 하수관로 조사 : *******************************

- 노선측량 : ************

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정(시 → 양천구)

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
*	************ ************	*******	*******	*****	**************** ***************

붙임 : 관련공문 및 증빙자료 각 1부.  끝.