문서번호	동물보호과-24600
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		동물정책팀장	동물보호과장
윤민		박연웅	06/21
			이미경
협 조

서울동물복지지원센터 동대문 설계용역 변경계약 계획

2022. 6.

시민건강국

(동물보호과)

서울동물복지지원센터 동대문 설계용역 변경계약 계획

서울동물복지지원센터 동대문 설계용역의 준공기한을 연장하고자 함.

계약개요

❍ 건    명 : 서울동물복지지원센터 동대문 설계용역

❍ 계약업체 : ***************(대표자 : 권영하)

❍ 계약금액 : ************

❍ 계약기간 : 2022. 4. 28.~ 6. 26.

계약변경

❍ 변경사유 : 현재 「서울동물복지지원센터 추가 조성을 위한 기본계획 수립 연구용역(수행기간 : '22.4~9월)」이 진행 중으로 「서울동물복지지원센터 동대문」운영관리 방안에 적합한 설계 진행을 위해 연구용역 수행 일정을 참고, 준공기한을 연기코자 함.

❍ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후
계약기간	'22. 4. 28.~ 6. 26.	'22. 4. 28.~ 8. 19.

※ 계약금액 변경없음

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

향후계획

❍ 준공기한 연기를 위한 변경계약 의뢰

붙임  준공기한 연기의뢰서, 합의각서, 과업내용서 3부.  끝.