행복한 변화, 사람 사는 동작
		동작구
수신		내부결재
(경유)
제목	2022년 가로등 시설물 정비공사(연간단가) 설계변경(1차) 시행

1.「2022년 가로등시설물 정비공사(연간단가)」에 대한 설계변경(1차)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 가로등시설물 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2022. 2. 25. ~ 12. 31.

다. 규    모 : 가로등주 설치·철거·이설 23본, 등기구 정비 288개소, 분전반 설치·철거 2면 등

라. 계 약 자 : (주)국일이앤씨 대표 서남석

마. 변경사유 : 발주시 추정물량을 기초로 설계한 사항으로 작업지시에 따른 공종별 작업물량 증·감 발생으로 설계변경

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로인프라확충, 도로조명관리, 가로등관리, 시설비및부대비, 시설비

사. 공사비 증·감내역

구 분		변 경 금 액(원)		증 ․ 감 액(원)	비 고
		당 초	변 경
도급비	공사원가	143,300,756	152,920,000	증)9,619,244
	부가가치세	14,330,074	15,292,000	증)961,926
	계	157,630,830	168,212,000	증)10,581,170

붙임   1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.

★주무관	임영철		도로조명팀장	김태환		도로관리과장	백원기		도시건설국장	06/22 고현정
협조자	계약팀장	오시연		재무과장	代이희열		일자리경제국장	김미경
시행	도로관리과-9447	(		)	접수		(		)
우			/	www.dongjak.go.kr
전화	02-820-9257	/전송	02-820-9981	/	sc0748@dongjak.go.kr	/	부분공개(5)