문서번호	물재생계획과-24603
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
박영호	정한영	06/23
		박홍봉

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

2022. 06.

물 재 생 계 획 과

하수도 정비사업 낙찰차액 사용 검토보고 (서초구)

「강남대로107길 24외 2개소 하수관로 개량공사」추진중 사토장 운반거리 증가, 보차도경계석 및 건설폐기물 물량증가 등 설계변경사항 발생에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임.

Ⅰ		사업 개요

○ 사업규모 : 하수관로 개량 D450~600㎜, L=913m

○ 공사기간 : 2022. 3. 30. ~ 2022. 9. 25.

○ 예산현황                                                        (단위 : 천원)

구분	사업명	예산액	기배정액	배정잔액 (심사절감액)	비 고
*	************ ***********	*******	*******	******	*************** ***************

Ⅱ		낙찰차액 집행 사유

○ 사토장 운반거리 증가, 건설폐기물 및 보도복구 수량 증가

- 사업규모 : *********************************

*******************************

************************

- 소요사업비 : ***************************

※ 소요사업비가 낙찰차액 초과*******************

Ⅳ		검토 의견

○ 하수관로 정비공사 추진과정에서 사토장 변경에 따른 운반거리 증가, 공사구간 주변 주민민원에 따른 노후 시설물 추가 정비 등으로 인해 추가 예산에 필요한 실정으로 본 공사의 낙찰차액을 활용하여 신속하게 추진함이 타당하다 판단됨.

Ⅴ		행정 사항

○ 낙찰차액 사용요청에 대한 회신 및 예산 재배정(시 → 서초구)

구분	사업명	예산액	기배정액	추가배정액	비 고
1	************ ***********	*******	*******	******	*************** ***************

- **********************************

붙임 : 관련공문 및 증빙자료 각 1부.  끝.