문서번호	운영과-22638
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	代이도훈	06/23
		최규동

3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사 공정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 06

중랑물재생센터

(운영과)

3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사 공정보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

악취방지시설 『3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사』시행중 물량변경 사유 발생되어 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

공 사 명: 3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사

계약금액: 금24,400,750원(금이천사백사십만칠백오십원정)

계 약 자: 동광이테크 대표 김인숙

계약기간: 2022. 05. 31. ~ 2022. 06. 29.

Ⅱ		공정보고 내용

중대재해예방 등(추락방지) 방호조치로 지상용 안전측정구     이전설치 개선을 위한 사업으로써.

3처리장 지상용 안전측정구 이전설치 크레인 대여비 물량변경.

–크레인대여비(70ton) : 0시간(기존) → 8시간(변경) = 증 8시간

현장 사진

3처리장 탈취기동 상부	측정관 크레인 대여필요(중량물)

설계내역서 검토

공 정	기존	변경	증감액	증 감 사 유
3처리장 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공사	24,400,750	26,433,000	2,032,250	고소 크레인 임대(중량물 추락 및 낙하물사고 방지) (증 1,432,590원) - 경 비 (증 599,660원)

Ⅲ		조치계획

3처리장 호기조 탈취기 지상용 안전측정구 이전설치 공정 및 내역서 검토결과 물량변동으로 금2,032,250원의 계약금액 증가요인이 발생하여 계약상대자와 협의하여 주요 증가분 등을 설계 변경하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계(변경) 내역서 1부.  끝.