				★ ◎
문서번호	기반시설부-1642			부 원			부원				기반시설부장			도시조성처장
보존기간	5년																06/22
				유재훈			권오종				노병철			나용환
결재일자	2022.06.22
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
문정역 연결통로 설치공사
1-2BL 연결통로 하부 가시설 보완 검토보고
		서울주택도시공사
( 도시공간사업본부 기반시설부 )

1-2BL 연결통로 하부 가시설 보완 검토보고

「도시철도 8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이/신설공사」관련, 1-2BL 연결통로 접속부 가시설 및 뒷채움 변동사항에 대한 적정성 및 소요비용 검토 후 설계변경시 반영코자 보고 합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이 ․ 신설공사 공사기간 : 2018. 03. 05.~2022. 09. 30. 도 급 자 : ㈜흥화 외 2개사 공사금액 : 14,725백만원 (도급비 126억, 지급자재 11억, 이설비 10억) 건설사업관리 : ㈜유신 외 3개사

Ⅱ		현황 및 문제점

현  황

□ 신설 #4번 출구 및 1-2BL 연결통로 구간은 당초 #4번 출구를 선시행토록 되어있었으나, SK V1(1-2BL) 지하확장계획 변경에 따라 시공순서 변경(1-2BL 연결통로 선시행)이 필요한 실정임.

[SK V1(1-2BL) 지하공간 확장 계획일정에 맞추어 1-2BL연결통로 시공]

구 분	평 면 도	단 면 도
현 황

문 제 점

□ 1-2BL 연결통로 선시공(시공순서 변경)에 따라 안전성 확보를 위하여 연결통로 하부 가시설 보완이 필요함.

(당초 #4번 출구 선시행에 따라 1-2BL연결통로 하부 가시설 미반영)

□ #4번 출구 및 1-2BL 연결통로 사이 되메우기 구간이 협소(55cm)하여 다짐 등 품질 확보의 문제가 있음.

구 분	정 면 도	단 면 도
현 황

구 분	1-2BL 구조물 하부
현 황

Ⅲ		검토 사항

검토 내용

□ 1-2BL 연결통로 선시행에 따라 안정성 확보를 위하여 구조물 하부 가시설(토류판 및 어스앙카) 추가보완

구 분	당 초	변 경
정면도
단면도

□ 흙막이 가시설 내부의 터파기 과정에서는 먼저 시공이 완료된 1-2BL 연결통로 구조물의 안정성이 주요 고려사항이며, 터파기 주변 발생하는 침하량 검토 필요.

거리(m)	0	1	2	4	6	8	10	12	13.544
지반침하량(mm)	-1.38	-1.18	-1.00	-0.68	-0.42	-0.23	-0.09	-0.02	0

- 각변위 : 침하량 / 거리 = 1.38mm / 13544mm = 1/9,814 < 1/500  --- O.K

- 허용각변위 : 1/500, 건물에 균열이 없도록 하는 안정한계

□ 가시설 근입장 검토

최종 굴착 단계	최종 굴착 전 단계

구 분	균형깊이 (m)	적용근입깊이 (m)	주동토압 (km·m)	수동토압 (km·m)	근입부 안전율	적용 안전율	판정
최종 굴착단계	1.149	2.5	387.86	1850.178	4.77	1.2	O.K
최종 굴착 전 단계	1.159	4.54	486.529	4748.946	9.761	1.2	O.K

□ 흙막이벽체 수평변위

부 재	시공단계	최대수평변위 (mm)	허용수평변위 (mm)	판 정
흙막이벽 (H-PILE)	굴착 1.46m	11.661	16.200	O.K

□ 제거식 앵커 제원표

단수	자유장 (m)	정착장 (m)	여유장 (m)	총길이 (m)	시공간격 (m)	시공각도 (˚)	재료
1	8.0	6.5	1.5	16.0	1.5	25	P.S 강연선 Φ12.7×4ea
2	6.0	6.5	1.5	14.0	1.5	25	P.S 강연선 Φ12.7×4ea

□ 제거식 앵커 적용 자유장 산정

단수	설치위치 (GL.-m)	필요자유장 (m)	안전거리 (m)	적용자유장 (m)	판 정
1	0.960	3.464	1.5	8.0	O.K
2	2.860	2.480	1.5	6.0	O.K

□ 제거식 앵커 적용 정착장 산정

단수	설치위치 (GL.-m)	마찰저항장 (m)	부착저항장 (m)	적용정착장 (m)	판 정
1	0.960	5.871	1.842	6.5	O.K
2	2.860	4.668	2.013	6.5	O.K

□ #4번 출구 및 1-2BL연결통로 하부 가시설 설치구간의 작업구간이 협소(55cm)하여 되메우기 품질 확보를 위하여 무근콘크리트 반영

[흙의 다짐시험방법에 의거 95%이상의 밀도가 되도록 균일하게 다짐이 이루어져야 하나, 작업구간 여건 상 다짐이 제대로 이루어 질 수 없어 무근콘크리트 반영]

구 분	당 초	변 경
단면도

Ⅳ		설계변경 검토

설계변경 타당성 검토

□「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장. 공사계약일반조건 제7절(공사 설계의 변경) 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정에 해당되어 설계변경에 반영함이 타당함.

단가 검토

□ 기술심사 검토결과 [견적발주부-2322호(2022.05.12.)]

: 토류판 설치 규격 수정 (공사비 감590만원)

□ 기존단가 수량증가분은 계약단가 적용

□ 신규비목 : 계약 낙찰율 80.022% 적용

수량 검토

□ 수량 증감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감	비 고
1. 가시설공
띠장 설치 및 철거	9-11m 이하	본	-	4	4
보걸이 설치 및 철거	2H-300x300	EA	-	27	27
2. 어스앵커
어스앵커천공	토사구간	m	-	75	75
어스앵커천공	연암	m	-	60	60
앵커그라우팅		m	-	135	135
제거식앵커	12.7M/M4연선	m	-	135	135
지압판 설치 및 해체		EA	-	10	10
인장작업	60ton	공	-	10	10
3. 구조물공
무근콘크리트 타설		m3	-	22	22
거푸집/유로폼	0-7m	m2	-	6	6

공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
사급자재비	-	1,613	1,613	강재사용료 등
가시설공	-	20,578	20,578	띠장,어스앵커 등
구조물 및 방수공	-	568	568	무근콘크리트 타설 등
직접공사비계	-	22,759	22,759
간접비	-	9,416	9,416
공급가액	-	32,175	32,175
부가세	-	3,218	3,218
도급액	-	35,393	35,393
지급자재비	-	1,436	1,436
총공사비	-	36,829	36,829

□ 공사비 증·감 현황                                    (단위:천원, VAT포함)

Ⅴ		조 치 계 획

상기 검토내용과 같이 1-2BL 연결통로 접속부 가시설 및 뒷채움 변경 사항에 대하여 추후 설계변경 시 반영코자함.

붙임  실정보고 내역서(1-2BL 연결통로 접속 하부 가시설 보완) 1부.  끝.