“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의위원회 개최(2022년 도봉구 관내 급수공사, 최종)

우리사업소에서 시행중인 『***************************』에 대하여 물량 증·감 등으로 인한 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 심의위원회를 개최하고자 합니다.

1. 일반현황

가. 공 사 명 : ***************************

나. 공사개요 : 상수도관 부설(D=13~300mm, L=856m)

다. 공사기간 : 2022. 2. 22. ~ 2022. 6. 30.

라. 도 급 비 : *************

마. 계약업체 : ****************

2. 설계변경 현황                                                              단위 : 원

구 분	당초금액	변경금액	증·감액
*****	***********	***********	************
****	***********	***********	************
*****	**********	**********	***********
****	*****************	*****************	*******************

3. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2022. 6. 27.(월) 13:00

나. 심의장소 : 급수운영과

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의위원 : 시설6급 서은교, 시설6급 박상권, 시설7급 안윤자, 시설7급 조은성

4. 심의내용

가. 설계변경의 타당성

나. 신규공종 단가산출 적정 여부

다. 제경비 적정 산정 및 적정 적용

라. 폐기물 운반 및 처리물량 적정 산정

마. 기타 제반규정 적정 준수여부 등

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이태화		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	06/27
이승완
협조자
시행	급수운영과-26179	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3350	/전송	02-3146-3389	/	0526jw@seoul.go.kr	/	부분공개(5)