문서번호	시설관리과-21452
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
이민호		라철흠	06/27
			박상보
협조	총무과장		정현석
	기획예산과장		김영창

설계변경(1차) 시행 보고

(2022년 한강공원 자전거도로 유지보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6

한 강 사 업 본 부

시 설 관 리 과

『2022년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)』

설계변경 시행(1차) 보고

『2022년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)』의 설계변경(1차)에   대한 검토 보고임.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2022년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)

○ 위    치 : 한강공원 자전거도로 78km 전 구간

○ 사업기간 : 2022. 3. 10. ~ 2022. 12. 31.

○ 사 업 비 : 1,821,840천원

(도급비 777,740천원, 관급비 940,000천원, 이전비 104,100천원)

○ 시 공 사 : 주식회사 한길포장  대표 김 진 영

○ 규    모

- 아스콘 포장 232a,  콘크리트 포장 3a, 보도포장 2a

경계석 설치 2,000m, 난간개보수 50경간, 차선도색 8,000m, 기타 부대공 1식 등

□ 설계변경 개요

○ 관 련 근 거

- 한강공원 자전거도로 포장정비 계획(시설관리과-20185호,‘22.4.1)

- 한강공원 자전거도로 노면표시 정비 계획(시설관리과-20440호,‘22.4.18)

- 광진교 북단 낙석방지시설 설치 계획(시설관리과-20731호,‘22.5.6)

○ 설계변경 사유

- 옴부즈만 점검결과에 따른 자전거도로 물고임구간 정비

- 반포공원 흑석초등학교 주변 긴급포장 및 경사지 그루빙 설치

- 광진교 북단 자전거도로 낙석방지책 설치 등

- 민원처리 및 공사여건 등에 따른 신규고종 및 물량 증감사항 반영

○ 주요공종 수량 변경 내용

공 종		단위	당초	변경	증•감
수량 변경	********	*	*****	*****	*****
	*******	*	*	**	*****
	**************	*	***	**	*****
	*********	*	***	*****	********
	****	*	***	***	******
신규 공종	********	*	*	***	******
	********	**	*	**	*****
	*********	*	*	**	*****
	*****	*	*	***	******
	************	*	*	***	****

○ 직접공사비 변경내역

(단위:원)

공 종	구분	단위	재료비	노무비	경비	합계	증•감
1.토공	당초	1식	*********	**********	**********	**********	**************
	변경		*********	*********	*********	**********
2. 구조물공	당초	1식	**********	**********	*********	**********	**************
	변경		**********	**********	*********	***********
3. 포장공	당초	1식	**********	***********	**********	***********	**************
	변경		**********	**********	**********	***********
4. 부대공	당초	1식	**********	**********	**********	**********	**************
	변경		***********	**********	**********	***********

○ 공사비 증·감 현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총공사비	**************	**************
도 급 비	***********	************	************
관급자재	************	************	************
이 설 비	***************	****************	************

□ 조 치 계 획

○ 상기와 같이 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

○ 변경 계약 시행

- 도 급 액 : *********************************

- 예산과목

► 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 자전거도로 유지보수, 시설비 및 부대비,

붙 임    1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액 검증확인서 1부.

3. 설계변경 자문위원회 심의결과서 1부.  끝.