				★ ◎
문서번호	기반시설부-1739			부 원			부원				도시조성처장
보존기간	30년										전결	06/28
				권오종			권오종				나용환
결재일자	2022.06.28
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
강일도시개발사업 강일육교 보수보강공사 실시설계용역
준공기한 연기 검토
		서울주택도시공사
(도 시 조 성 처)

강일육교 보수보강공사 실시설계용역 준공기한 연기 보고

강일육교 보수보강공사 실시설계용역 시행중 관리청(동부도로사업소) 협의 및 자문 결과에 따라 특정공법(제품) 선정 및 유관기관 협의 등에 소요되는 기간을 추가 반영하여 준공기한을 연기코자함

Ⅰ		용역 개요

용 역 명 : 강일도시개발사업 강일육교 보수보강공사 실시설계용역

용역기간 : 2022.01.21.~2022.06.30.

용 역 사 : ㈜서경기술공사 대표

도 급 비 : 47,997천원

Ⅱ		준공기한 연기

사유

- 실시설계 자문(중간보고) 및 관리청 협의 결과, LMC공법으로 교면포장이 결정됨에

따라 특정제품(공법) 심의 및 설계도서 작성에 추가 기간 소요

- 고속도로 상부에서 배수공 등 일부 공정이 진행됨에 따라 한국도로공사 협의 필요

용역기간 변경

구분	착수일	준공일	비고
당초	2022.01.21.	2022.06.30.
변경	2022.01.21.	2022.08.31.	증)62일

- 지연배상금 : 미부과(계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체)

Ⅳ		행정사항

본 방침을 계약부서에 통보하여 변경계약 체결

붙임  계약자 준공기한 연기요청 공문(별첨) 1부.  끝.