				★ ◎
문서번호	도시기전부-397			부 원			도시기전부장				기전사업처장
보존기간	10년											04/11
				권영상			김수경				박철규
결재일자	2022.04.11
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)
지급자재 철제가로등주 발주 검토보고
		서울주택도시공사
(건설사업본부 도시기전부)

서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)

지급자재 철제가로등주 발주 검토보고

우리공사에서 시행중인 위례지구 택지전기공사와 관련하여 일부구간 소로 및 공원산책로에 대해 인수기관인 송파구청에서 등기구 형태의 변경(공원등→보안등)의견이 있어 이를 반영 후 해당 조명기구 설치를 위한 지급자재를 아래와 같이 구매하고자 보고합니다.
		lll

1

관련근거

○ “송파구청 업무협의에 따른 결과보고”(도시기전부-185호, 2022.03.28)

○ 업무협의 회의록(2022.03.31)

2

도급공사 계약현황

공사명	계약상대자	계약금액	공사기간	비고
서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등 공사(3공구)	㈜연성, 한양전기㈜	4,904,983,000원	2016.08.19.~ 2022.11.30.

3

설계현황 및 변경사항

가. 당초설계

구 분	소로		공원 산책로
	소(특)위서1-7	소(특)위서1-10	공공용지17호
수량	8본	4본	18본
규격	공원등 60W	공원등 60W	공원등 60W
등기구 타입	공원등 A-6 type	공원등 A-6 type	공원등 A-6 type

※ 공원산책로는 당초 설계에는 미반영이나, 산책로 조성에 따라 공원등 설치가 계획됨.

나. 송파구청 업무협의에 따른 변경사항

구 분	소로		공원 산책로
	소(특)위서1-7	소(특)위서1-10	공공용지17호
수량	8본	4본	18본
규격	보안등 50W	보안등 50W	보안등 50W
등기구 타입	단독택지에 설치된 보안등 적용
특이사항	-		침수방지를 위해 점검구 높이를 최대한 높게 설치(2m)
협의부서 및 담당	공원녹지과 권형준주무관 도로과 정대현 주무관		치수과 이은규주무관

※ 서울시 야간경관 지침에 근거하여 소로에 설치되는 등기구는 색온도 4,000K 적용

하고, 공원 산책로에는 3,000K적용

다. 변경 사유

- 인수기관인 송파구청에서 기 설계된 공원등보다 보안등이 향후

유지관리 차원에서 용이하다는 의견으로 변경협의 함

4

지급자재 소요현황 및 발주방법

가. 지급자재 소요현황

○ 철제가로등주 구매

구 분	품 명	규 격	수량	단가(원)	금액(원)	물품식별번호
서울 위례지구 택지 전기공사 철제가로등주 (보안등용) 구매	철제가로등주	높이 5m, 1등용, 암 1m	30	550,000	16,500,000	22496321
	조달수수료	합계 금액의 0.54%	1	89,100	89,100	-
	계				16,589,100	-

※ 기존 단독주택부지 철제가로등주가 납품완료(’22.03.11)하여 준공처리함에 따라 신규계약 추진

○ 보안등기구 구매: 기존 계약건의 설계변경

계약건명	계약상대자	계약금액(원)	공사기간	증가금액(원)
서울 위례지구 택지 전기공사(3공구) 단독주택부지 LED보안등기구 구매	㈜우담라이팅	48,216,000	’21.12.27.~ ’22.06.22	294,000원/개×30개 = (증) 8,820,000

나. 구매방법

○ 조달구매: 나라장터종합쇼핑몰에 등록된 제품 구매

※ 계약금액이 5천만원 이하(특정기술선정위원회 제외대상)로 관련규정에 따라 제품에

대한 품질확보 가능

5

검토의견 및 행정사항

- 위례택지 내 일부구간 공원등기구에 대하여 인수기관 요청에 따라 등기구 타입

변경을 추진하며, 이를통해 향후 인수인계를 원활하게 하고자 하며,

- 기존 지급자재 계약건 중 공원등 A-6(60W) 타입은 소로부분 수량(12본)이

감소됨에 따라 준공 시 정산처리토록 처리함.

- 해당 변경사항을 견적발주부 및 계약부에 통보하여 지급자재 구매와 설계변경

(보안등기구 수량증가) 추진하고자 합니다.

붙임  1. 송파구청 업무협의에 따른 결과보고(도시기전부-185호, 2022.03.28) 1부

2. 송파구청 치수과 회의록(2022.03.31) 1부

3. 발주관련 서류 1부.  끝.