코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	서울디딤플라자 사업계획 재검토 용역 계약변경(기간연장) 검토

1. 일로G-3호(2022.03.02.)와 관련입니다.

2. 우리공사와 계약체결하여 용역시행 중인 『서울디딤플라자 사업계획 재검토 용역』에 대하여 연장계약 요청이 있어 아래와 같이 계약변경(기간연장)을 시행하고자 합니다.

-     아     래     -

가. 계약현황

용 역 명	계 약 자	계약기간	비고
서울디딤플라자 사업계획 재검토 용역	㈜일로종합건축사사무소	2021.03.12. ~2022.03.11

나. 계약변경 내역

- 계약기간 변경

계 약 명	구분	현재 계약기간	변경 계약기간	비고
서울디딤플라자 사업계획 재검토 용역	계약기간	2021.03.12. ~2022.03.11	2021.03.12. ~2022.06.09	증) 90일

※ 계약금액, 계약자 등 기타 변경사항 없음

다. 변경 사유

- 市 중앙투자심사 의뢰일정 변경(기정: 2021.12 → 변경: 2022.03)에 따라 행정절차 지원을 위한 절대공기 부족

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  계약연장 요청공문_일로종합건축사사무소 1부.  끝.

부 원						공유재산개발부장				공유재산사업처장		03/04
		오민택						김윤희			나용환
협조자

시행			공유재산개발부-551				(2022.03.04)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울시 강남구 개포동 14-5								/	www.i-sh.co.kr
전화		3410-7425			전송	3410-7422		/	omt89@i-sh.co.kr					/	공개