				★ ◎
문서번호	기전사업부-897			부 원					기전사업부장					마곡위례사업처장
보존기간	20년													전결		03/08
				장재욱					정기철					남시명
결재일자	2022.03.08
공개여부	부분공개(7)			협조	부 원					이정식
일상감사	대상
								일상 감사		No.					감사					의견
										2022/03/08					김동주					의견있음
위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사
설계변경 및 물가 변동으로 인한 계약금액 조정 시행
		서울주택도시공사
( 마곡위례사업처 기전사업부 )

설계변경 및 물가 변동으로 인한 계약금액 조정 시행

[위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사]

우리공사에서 시행중인 위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사와 관련하여 설계변경 및 물가 변동으로 인한 계약금액조정 시행 후 추진업무에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ. 관련근거

❍ 공사계약 일반조건 제6절, 제7절

❍ 위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사 설계변경 보고[기전사업부-862호, 2022.03.07.]

❍ 제4회 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 보고[기전사업부-4068호, 2021.11.19.]

❍“위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사”변경계약 요청의 건[두산건설-2022-1614호, 2022.03.07.]

Ⅱ. 계약현황

계약명	계약자	계약기간	계약금액(원)	비고
위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사	두산건설㈜	2017.12.19.~ 2022.11.30.	5,326,257,000

[주요 설계변경 관련 자료]

[BIT 거치대 설치도]	[자가망 경로 변경도]	[자가망 임시선로 구성도]	[TOPIS 연결 전용선로 삭제]
[기간통신망 접속관로 반영]	[방범CCTV 기초 이설]	[방범CCTV 기초 이설]	[방범CCTV 2개소 삭제]
[재해예방 경보설비 위치도]	[장비 설치 상세도]	[장비 함체 구성도]	[불법주정차단속장비 위치 변경]

Ⅲ. 설계변경 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내용

❍ 주요 변경내용, 계약금액 조정현황 등 세부내역

구분		주요 변경내용		계약금액 조정액(천원)	비고
		당초	변경
위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사	BIT 거치대 설치 반영	- 없음	- BIT 거치대 설치 28개소	7,373	기전사업부-862 (2022.03.07.)
	자가망 경로변경	- 광케이블 SM48C 1,295m - 광케이블 코아접속 없음 - 광케이블 접속함체 없음 - 슬리브(통과수공) 14개소 - 슬리브(접속수공) 없음	- 광케이블 SM48C 2,487m - 광케이블 코아접속 48코아 - 광케이블 접속함체 1개소 - 슬리브(통과수공) 17개소 - 슬리브(접속수공) 1개소	9,207
	자가망 임시선로 구성	- 없음	- 광케이블 SM48C 설치 311m - 광케이블 SM48C 철거 311m - 광케이블 코아접속 102코아 - 광케이블 접속함체 설치 2개소 - 광케이블 접속함체 철거 2개소 - 슬리브(통과수공) 2개소	5,783
	TOPIS 연결 전용선로 삭제	- 광케이블 SM12C 2,412m - 광케이블 SM 8C 50m - 광케이블 코아접속 44코아 - 광케이블 성단 16개소 - 광케이블 접속함체 3개소 - 광분배반(FDF) 1개소 - 슬리브(통과수공) 19개소 - 슬리브(접속수공) 4개소	- 없음	-15,788
	기간통신망 접속관로 반영	- 없음	- 터파기,되메우기 11㎥ - FC관 포설 Ø50mm 18m - 보도 걷기 및 재포장 36㎡ - 슬리브(통과수공) 2개소	590
	방범CCTV 설치계획 변경 및 이설공사 반영	- 기초 이설 없음 - 방범CCTV 설치 5개소 - 휴먼링 상부 통신관로 반영 - 보조카메라 설치 110개 - VMS채널 라이선스 125copy - 일반비상벨 설치 48개소 - 마이크케이블 설치 없음	- 방범CCTV 기초 이설 2개소 - 방범CCTV 설치 3개소 - 휴먼링 상부 통신관로 삭제 - 보조카메라 설치 70개 - VMS채널 라이선스 162copy - 영상비상벨 설치 46개소 - IP방송단말기 설치 46개소 - 마이크케이블 설치 297m	-26,691
	재해예방경보설비	- 없음	- 재해예방경보설비설치 1식	37,223
	불법주정차단속장비 설치계획 변경	- 없음	- 단속장비 설치위치 변경 1개소 (PC-SP-05 위치 이동) - 방범용 Arm 설치 9대 - 장애제어기 설치 9대 - 스위칭허브 설치 9대 - 부착물방지시트 설치 9개소	6,503
설계변경 직접비 소계				24,200	재료비 증)45백만원 노무비 감)20백만원
설계변경 간접비				-3,584	직접노무비 감소에 따라 간접비 감소
물가변동 조정금액				58,515	기전사업부-4068 (2021.11.19.)
합 계				79,131	(1.5% 증)

- 신규비목에 대한 적용단가 낙찰율 : 계약낙찰율(86.745%) 적용 [협의 완료]

Ⅳ. 계약변경 내용

계약명	계약자	계약금액(원)
		당초	변경	증감
위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사	두산건설㈜	5,326,257,000	5.405,388,000	증) 79,131,000

- 계약기간 : 변경 없음.

Ⅵ. 행정사항

❍ 계약부에 변경계약 체결 의뢰.

붙임  1. 변경계약 내역서(설계변경 및 제4회물가변동)

2. 위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사 설계변경 보고

3. 제4회 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 보고

4. "위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사"변경계약 요청의 건.  끝.